투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(수정예정공정표 승인 통보)

1.업무지시현장 : 동북권 아동청소년 예술교육센터 및 강북구 종합체육센터 건립공사 아

주건설 주식회사, 동북권 아동청소년 예술교육센터 및 강북구 종합체

육센터 건립공사 (주)종합건축사사무소근정, 동북권 아동청소년 예술

교육센터 및 강북구 종합체육센터 건립공사 한울건설(주), 동북권 아

동청소년 예술교육센터 및 강북구 종합체육센터 건립공사 대상건설주

식회사, 동북권 아동청소년 예술교육센터 및 강북구 종합체육센터 건

립공사 주식회사 동해종합기술공사, 동북권 아동청소년 예술교육센터

및 강북구 종합체육센터 건립공사 주식회사 금아건설

2.작 성 일 자 : 2022-06-08 10:06:03

3.지 시 내 용

가. 동북권CM 제22-061(2022.03.31.)호와 관련입니다.

나. 『동북권 아동청소년 예술교육센터 건립공사』와 관련하여 공사기간 연장에 따라 제출하신 수정예정공정표는 승인하오니, 안전 및 공정관리에 철저를 기해 주시기 바랍니다.

다. 아울러, One-PMIS상 공정산정기초를 변경공정에 맞게 수정하여 업무에 차질이 없도록 하시기 바랍니다.  끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시

One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 재작성을 해

주시기 바랍니다.

주무관	오종근		건축설계과장	장윤수		건축부장	06/08
신명승
협조자
시행	건축부-24315	(	2022.06.08	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스빌딩 (무교동) 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2672	/전송	02-3708-2659	/	ohjongkeun@seoul.go.kr	/	부분공개(5)