문서번호	도시철도계획부-22316
결재일자	2022. 6. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도시철도설계과장	도시철도계획부장
조종석		강명석	06/08
			정대현
협조

- 9호선 4단계 연장사업 궤도기본설계용역 - 준공기한 연기 검토 보고

2022. 6.

도시기반시설본부

(도시철도계획부)

- 9호선 4단계 연장사업 궤도기본설계용역 -

준공기한 연기 검토 보고

서울도시철도 9호선 4단계 연장사업 건설공사 궤도기본설계용역의 준공기한을 연기하고자 보고 드림

1		용 역 개 요

ㅇ 위    치 : 서울특별시 강동구 중앙보훈병원~고덕 강일1지구

ㅇ 규    모 : 연장 4.123km(복선), 정거장 4개소

ㅇ 총용역비 : 167,950천원

ㅇ 용 역 사 : ㈜도화엔지니어링

ㅇ 용역기간 : 2021. 8. 24. ~ 2022. 6. 20.

2		추 진 경 위

ㅇ '21. 8. 24. : 용역 계약

ㅇ '21. 8. 25. : 용역 착수

ㅇ '21. 11. : 1, 3공구 건설공사 실시설계적격자 선정 및 실시설계 착수

ㅇ '22. 2. 8. ~ 2. 11. : 궤도 설계기준 및 궤도구조 선정 전문가 자문

ㅇ '22. 5. ~ 6. : 설계경제성(VE) 검토(기술심사담당관)

ㅇ '22. 6.  . : 준공기한 연장 요청

• 연장사유: 1공구 및 3공구 건설공사의 기본설계 지연으로 설계심의 등 각족 심의 및 총사업비 변경 협의에 소요되는 과업기간 부족

• 연장기간: 2021.8.25~2022.6.20. → 2021.8.25~2022.9.20.(증 3개월)

3		검 토 의 견

ㅇ 1공구 및 3공구 건설공사 설계시공 일괄입찰(T/K) 유찰로 인해 기본설계 완료가 지연됨에 따라 후속 용역인 궤도기본설계에 수반되는 설계심의 등 각족 심의 및 총사업비 변경 협의를 위한 용역기간이 절대적으로 부족한바, 원활한 용역 수행을 위해 준공기한을 연장코자 함

ㅇ 용역기간 ┌ 당초 : 2021. 8. 25. ~ 2022. 6. 20.

┖ 변경 : 2021. 8. 25. ~ 2022. 9. 20.(증 3개월)

ㅇ 계약금액 : 변동 없음

ㅇ 귀책사유 : 계약자 귀책사유 없음(지체상금 미부과)

4		향 후 계 획

ㅇ '22. 6. : 설계경제성(VE) 검토 완료

ㅇ '22. 7. ~ 8. : 건설기술심의(설계심의)

ㅇ '22. 7. ~ 9. : 총사업비 변경 협의

ㅇ '22. 9. : 용역 준공

붙임  1. 준공기한 연기의뢰서 1부.

2. 계약기간 연장 요청 공문(연장요청서, 합의각서) 1부.  끝.