코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서 울 특 별 시
수신	재무과장
(경유)
제목	관급자재 계약변경(공조설비 수량변경)및 부속자재 추가구매 요청(남산 회현자락 한양도성 유적전시관)

남산 회현자락 한양도성 유적전시관 조성공사와 관련하여 사용할 관급자재(냉난방기)를 구매·계약하였으나 제품규격에 착오가 있어 변경계약(수량 변경 및 추가구매)을 요청드립니다.

가. 계약건명: 한양도성 유적전시관 냉난방기 관급자재 구매

나. 구매방법: 조달구매(G2B) (납품요구번호:12-22-2-20759-00, 12-22-2-20815-00)

다. 계약(수량)변경 내역

(단위: 원)

기존 계약현황 (2022.4.13.)				변경계약 내역(금회 변경 요청)
규 격	수량	단가	소요액	수량	단가	소요액	비 고(증감)
공기순환기, 은성화학, 150㎥/h	2	532,000	1,064,000	7	532,000	3,724,000	증) 2,660,000
공기순환기, 은성화학 350㎥/h	2	626,000	1,252,000	0	0	0	감) 1,252,000
공기순환장치, 기본설치 평균Φ100mm	2	1,100,000	2,200,000	7	1,100,000	7,700,000	증) 5,500,000
공기순환장치, 기본설치 평균Φ150mm	2	1,280,000	2,560,000	0	0	0	감) 2,560,000
스파이럴 덕트, 1m당	48	17,190	825,120	85	17,190	1,461,150	증) 636,030
플렉시블덕트, 1m당	41	6,170	252,970	76	6,170	468,920	증) 215,950
덕트부자재(디퓨져)	8	14,250	114,000	0	0	0	감) 114,000
덕트부자재(엘보)	11	6,700	73,700	0	0	0	감) 73,700
덕트부자재(리듀싱분기관)	4	10,730	42,920	0	0	0	감) 42,920
룸컨트롤러세트 및 설치	4	28,500	114,000	7	28,500	199,500	증) 85,500
룸컨트롤러용전선 및 전선관 설치	57	4,080	232,560	105	4,080	428,400	증) 195,840
소 계			8,731,270			13,981,970	증) 5,250,700
조달수수료(0.54%)			47,149			75,503	증) 28,354
합 계			8,778,419			14,057,473	증) 5,279,054

※ 귀책사유: 제품규격 확인 착오로 변경(서울시)

라. 추가 구매내역(부속자재)

규 격	수량	단가	소요액
공기순환기, 은성화학 천정점검구 600*600mm (G2B식별번호 24262331)	5	100,000	500,000
조달수수료(0.54%)			2,700
합 계			502,700

마. 납품기한: 변경없음

붙임  1. 관급자재(공기순환기) 변경계획 보고 1부

2. 관급(냉난방기)자재 수급관리조서(변경전·후) 1부

3. 관급자재 변경내역서(공기순환기 및 부속자재) 1부

4. 관급자재 추가구매(공기순환기 부속자재 점검구) 1부.  끝.

	한양도성도감과장
주무관	왕승찬		도성관리팀장	이원재		한양도성도감과장	06/08
김홍진
협조자
시행	한양도성도감-22362	(	2022.06.08	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 서소문별관 4층	/	http://seoul.go.kr
전화	02-2133-2671	/전송	02-2133-1063	/	vivawang@seoul.go.kr	/	부분공개(6)