부 장		06/08		과 장	최문기	심사자	박노성	설계자	박은민		설 계	심 사			결 재
		이철									2022년 6월 일	2022년 6월 일
변 경 설 계 서(6차 2회)
	용역명 서울시 신림선 도시철도 민간투자사업 건설사업관리용역 3공구(6차 2회)
	구 분					당 초				변 경			증, 감
	총 용 역 비					814,960,000				862,360,000			증)	47,400,000
	도급비		공 급 가 액			662,910,685				662,910,685			증)	0
			물 가 변 동			61,590,000				104,090,000			증)	42,500,000
			소 계			724,500,685				767,000,685			증)	42,500,000
			부 가 가 치 세			72,450,069				76,700,069			증)	4,250,000
			손해배상공제료			18,009,246				18,659,246			증)	650,000
			계			814,960,000				862,360,000			증)	47,400,000
< 용역개요 > ○ 공사개요 : 총연장 1,642m(정거장 3개소, 환기구 2개소, 터널 및 개착) ○ 감리기간 : '21. 4. 25. ~ '22. 6. 28.