문서번호	정보공개정책과-26051
결재일자	2022. 6. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	기록관리팀장	정보공개정책과장
최지현	김성민	06/09
		김숙희

디지털 기록문화관 실시설계 및 제작·설치 사업

착수보고회 결과보고

2022. 6.

행  정  국

(정보공개정책과)

디지털 기록문화관 실시설계 및 제작·설치 사업

착수보고회 결과보고

정보공개정책과 과장 : 김숙희☎2133-5698 기록관리팀장 : 김성민☎5692 담당 : 최지현☎5695

「디지털 기록문화관 실시설계 및 제작·설치 사업」 착수보고회를 개최하고 그 결과를 아래와 같이 보고드림

□ 보고회 개요

ㅇ 일    시 : 2022. 6. 9. (목) 10:00 ~ 11:00

ㅇ 장    소 : 서울시청 본청 7층 공용회의실

ㅇ 참석인원 : 총 10명

- 서 울 시 : 행정국장, 정보공개정책과장, 기록관리팀(6명)

- 수행업체 : ㈜휴먼씨(2명)

ㅇ 주요내용 : 사업수행계획 및 수행방안, 향후일정

□ 진행순서

시간	내용	진행
10:00 ~ 10:10	개회 (진행순서 및 의사결정 부분 설명)	사업담당자
10:10 ~ 10:30	보고 (사업수행계획 및 향후일정)	사업PM
10:30 ~ 11:00	질의응답 (디자인 및 콘텐츠 관련 논의)	참석자 전원

□ 주요의견

	【 디자인 관련 】
***************************************************************************** ******************************************** ************************************************************

	【 콘텐츠 관련 】
********************************************* ***********************************************************************************

□ 향후계획

ㅇ 전문가 자문 및 실시설계 확정           : 6월

ㅇ 기존전시 철거 및 현장개설              : 7월

- 확정된 설계(안)으로 전기ㆍ통신 공사 진행    : 7월 둘째주 ~ 셋째주

- 금속 및 목공ㆍ도장공사                     : 7월 셋째주 ~ 넷째주

ㅇ 전시 콘텐츠 제작 및 HW 발주           : 7월 ~ 8월

ㅇ SW 및 HW 현장적용                    : 8월

ㅇ 준공                                   : 8월 31일 (예정)