문서번호	물재생시설과-22758
결재일자	2022. 6. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	물재생기전팀장	물재생시설과장		물순환안전국장
곽윤석	최년수	김윤수		06/09
				한유석
협 조

- 스마트 하수처리공정 인프라 구축 - 과업변경에 따른 설계변경 보고

2022. 6.

물순환안전국

물재생시설과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료, 빅데이터 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

『스마트 하수처리공정 인프라 구축』

과업변경에 따른 설계변경 보고

물재생센터 공정운영의 체계적 관리를 위해 시행중인 「스마트 하수처리공정 인프라 구축」사업의 과업변경 및 심사결과에 따른 설계변경을 아래와 같이 보고드림

Ⅰ		추진근거

▢ 「소프트웨어 진흥법」제50조

- 과업내용 변경의 확정 및 이에 따른 계약금액·계약기간 조정

▢ 「소프트웨어 진흥법 시행령」제45조~제47조

- 과업심의위원회 구성 및 운영, 과업내용의 확정·변경 절차

▢ 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」제26조~제27조

- 과업내용변경 등이 발생한 경우 과업심의위원회에서 적정성 심의

▢ 스마트 하수처리공정 인프라 구축 과업변경 심의위원회 개최 결과보고

(물재생시설과-20704,2022.04.08)

▢ 스마트 하수처리공정 인프라 구축 예산타당성 심사결과 통보

(정보시스템담당관-23527,2022.05.31)

Ⅱ		사업개요

▢ 사 업 명 : 스마트 하수처리공정 인프라 구축

▢ 용 역 사 : (주)테크윈시스템외 2개사(대표 김래진)

▢ 용역기간 : '21. 6. 24. ~ '22. 8. 23.

▢ 계약금액 : 금1,702,923천원

▢ 용역내용

- 서울물재생시설공단 및 물재생센터 간 망연결 및 시스템 표준화

- 공단내 통합상황실 구축 및 빅데이터 확보를 위한 DB인프라 구축

- 중단없는 물재생운영을 위한 온라인 원격 모니터링 플랫폼 구축

Ⅲ		그간 추진현황

▢ '20.10.20. : 스마트 하수처리공정 인프라 구축

▢ '21.01.~04. : 사전절차 시행

- 행안부 사전협의 시행, 제안요청서 및 보안성 검토, 일상감사

▢ '21.04.~06. : 사업발주 및 계약체결

▢ '21.07.~09. : 착수보고 및 관계자 회의 개최

▢ '21.11.~'22.03. : 과업변경사항 검토 및 통합서버 이전검토

- 착수보고 및 관계자 회의결과 등에 따른 변경내용 검토

- 통합서버 등 서버실 이전검토(공단본부→데이터센터)

▢ ‘22.03. : 통합서버 이전에 따른 보안성 검토완료(검토결과:적정)

▢ ’22.04. : 과업변경요청에 따른 과업변경심의회 개최

- 통합서버 이전 및 용역기간 연장 등 과업변경(안)에 대한 심의개최

- 심의결과 적정으로 최종 승인의결(승인 3명, 조건부승인 1명, 불가 1명)

▢ ‘22.04.~05. : 과업변경에 따른 원가심사 시행(정보시스템담당관)

- 심사결과 : ******************

Ⅳ		설계변경 사항

▢ 변경내용

(단위:천원)

구분	당초	변경	비고
****	**********	**********	********
****	******************	******************	******* *****

▢ 설계변경 사유

- ******************************************************************************************

- *********************************************************************

- ***********************************************************************************************************************************************

▢ ***************

Ⅴ		세부 변경내용

▢ 통합서버실 HW 구매

구 분	당초	변경	계약금액	변경금액 (낙찰율 적용)	증,감
******	*	*	**********	**********	*************
******	*	*	**********	**********	************
******	*	*	**********	**********	************
*******	*	*	**********	**********	************
*****	*	*	**********	**********	************
****	*	*	**********	*	*************
*****	*	*	**********	**********	*************
*******	*	*	**********	*	*************
*****	*	*	*	*********	************
******	*	*	*	**********	*************
******	*	*	*	**********	*************
******	*	**	*	*********	************

- ************************************************************************************************************************

**********************************************************************************

*************************

▢ 통합서버실 SW 구매

구 분	당초	변경	계약금액	변경금액 (낙찰율 적용)	증,감
****	*	*	*********	*********	************
************	*	*	*********	*********	************
****	*	*	**********	*	*************
******	*	**	*	*********	************
*********	*	*	*	**********	*************
*********	*	*	*	**********	*************
******	*	**	*	*********	*************

- **************************************************************************************************

************************************************

*******************************************************************************************************************************************************************************************************

*************************************************

▢ 응용SW 신규개발

구 분	당초	변경	계약금액	변경금액 (낙찰율 적용)	증,감
*********	*	*	*	**********	*************
************	*	*	*	***********	**************
*********	*	*	*	*********	************

- **************************************************************************************

▢ 공단본부 통합관제상황실 제작 및 설치

구 분	당초	변경	계약금액	변경금액 (낙찰율 적용)	증,감
********	*	*	**********	*	*************
******* *************	**	*	**********	*	*************
*********	*	*	*********	*	************
*****	*	*	**********	*	*************
***	*	*	*********	*	************
*******	**	*	*********	*	************
*******	**	*	*********	*******	************
*****	**	**	*********	*********	************

- *********************************

▢ 물재생센터 HW 구매

구 분	당초	변경	계약금액	변경금액 (낙찰율 적용)	증,감
*****	*	*	**********	*	*************
****	*	*	**********	*	*************
*******	*	*	*	***********	**************
***	*	*	*	*********	************
*****	*	*	*	**********	*************
*****	*	*	*	**********	*************

- ********************************************************************

*******************************************************************

*************************************

▢ S/W 구매 및 추가제안사항

구 분	당초	변경	계약금액	변경금액 (낙찰율 적용)	증,감
*********	**	*	**********	**********	*************
************	**	*	**********	*	*************
************	*	*	*	**********	**************
******	*	*	**********	*	************
*****	*	*	*********	*	*************
******	*	*	**********	*********	*************

- **************************************************

************************************

Ⅳ		향후추진 일정

▢ DB설계 및 센터별 데이터정확성 검토 : ‘22. 6. ~ 8.

▢ 센터별 및 데이터센터 전용망 구축 : ‘22. 7. ~ 8.

▢ 통합서버 설치시행(데이터센터) : ‘22 . 8

▢ 센터 및 데이터센터간 데이터 품질진단 : ’22. 8 ~ 9.

Ⅱ		행정사항

▢ 변경계약 의뢰(계약금액 변경 및 계약기간 연장)(→재무과) : ‘22.6.9

▢ 추가과업 등 연장사업 용역수행 : ~ ‘22. 11. 20.

붙임  1. 합의각서 각1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 심사결과 각1부.  끝.