투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	신림선 도시철도 건설사업관리용역(3공구) 변경계약 의뢰(총괄12회, 6차 2회)

1. 도시철도사업부-22719호(2022. 6. 7.) 관련입니다.

2. 신림선 도시철도 민간투자사업 건설사업관리용역(3공구)의 감리원 투입계획 변경 및 물가변동금액 반영으로 인한 계약금액이 변경되어 다음과 가이 변경계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명: 신림선 도시철도 민간투자사업 건설사업관리용역(3공구)

나. 계 약 자: (주)수성엔지니어링, (주)동일기술공사, (주)백림종합건축사사무소

다. 용역기간

구분	용역기간	비고
총괄 12회	'11. 11. 1. ~ '22. 6. 28.	계약기간 변경없음
6차 2회	'21. 4. 25. ~ '22. 6. 28.

라. 용역금액 조정 내역

(단위: 천원)

구분	당초	변경	사유
총괄 12회	3,680,000	3,727,400	- 계약기간 : 변경없음 - 계약금액 : 증)47,400 - 변경사유 : 물가변동 반영
6차 2회	814,960	862,360

마. 예산과목

- 신교통수단도입, 경전철건설사업, 신림선 경전철 건설, 시설비및부대비, 감리비(도시철도건설사업특별회계)

붙임  1. 계약금액 조정 검토보고서 1부.

2. 변경 내역서(총괄12회) 1부.

3. 변경 내역서(6차 2회) 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.

	도시철도사업부장
주무관	박은민		공정관리과장	代박노성		도시철도사업부장	06/09
代김상용
협조자	주무관	박노성		재무과장	전성권
시행	도시철도사업부-22816	(	2022.06.09	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스빌딩 9층	/	www.seoul.go.kr
전화	02-772-7163	/전송	02-772-7305	/	2mpark@seoul.go.kr	/	부분공개(6)