문서번호	토목부-24699
결재일자	2022. 6. 9.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
이회진		황윤기	06/09
			하현석
협조

- 창동 상계 동서간 연결교량 건설공사 건설사업관리용역 -

수방기간 건설사업관리단 운영계획 보고

2022. 06

도시기반시설본부

(토  목  부)

- 창동 상계 동서간 연결교량 건설공사 건설사업관리용역 -

수방기간 건설사업관리단 운영계획 보고

『창동 상계 동서간 연결교량 건설공사』수방기간 건설사업관리단 운영계획을 보고 드림

○ 수방기간 5개월 중 3개월 상주감리원 축소 운영(6.15.~9.15.)

□ 근  거

○ 2022년 수방기간 건설사업관리단 운영계획 보고 (창동상계 제22-115호, '22.06.03.)

○ 수방기간 건설사업관리단 운영계획 제출 요청(토목부-24324호, '22.06.02)

□ 용역개요

○ 용 역 명 :  창동 상계 동서간 연결교량 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(장기계속)

○ 용역기간

- 총차 : '21. 04. 19. ∼ '24. 05. 17.

- 1 차 : '21. 04. 19. ∼ '22. 03. 18.

- 2 차 : '21. 03. 20. ∼ '22. 12. 31.

○ 도 급 비 : *********************************

○ 용 역 사 : ***************

□ 감리원 운영 계획

○ 운영기간 : 수방기간 중 3개월 축소 운영 (6.15 ~ 9.15)

○ 투입인원 : 당 초 20인/월 ⇒ 변 경 17.5인/월 감)2.5인/월

(단위 : 인/월)

구 분	특 급	고 급	중 급			계	비 고
	책임기술인	토 목	안 전	토 목	강 교
****	*	*	*	*	*	**
*****	*	*	*	*	***	****
***********	**	**	**	**	***	****

※ 강교 상주 감리원 보행교 강교 Shop Dwg 완료되는 7월초 투입 예정

○ 용역금액 변경 내역(2차계약)

- ****************************************

(단위:천원)

구 분		전 체	1차(준공)	2차(금회)	잔 여	비고
용역기간		********* * *********	********* * *********	********* * *********	*
합 계	당 초	*********	*******	*******	*********
	변 경			*******	*********
창 동	당 초	*********	*******	*******	*********
	변 경			*******	*********
헌릉로	계약분	*******	******	*******	***

□ 조치계획

○ 건설사업관리단 운영계획을 검토한바 적정한 것으로 판단되며 수방        기간 상주 감리인원을 축소운영하여 예산을 절감하고 건설사업관리단을        효율적으로 운용하고자 함.

붙 임 : 수방기간 건설사업관리단 운영계획 보고서 1부. 끝.