문서번호	물재생시설과-22849
결재일자	2022. 6. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		물재생운영팀장	물재생시설과장
조현정		김태환	06/10
			代조장환
협조	안전총괄과장		代주재완
	안전정책팀장		박동욱

난지수계(한강) 차집관로 검토보고

2022. 6.

물순환안전국

(물재생시설과)

난지수계(한강) 차집관로 검토보고

난지물재생센터 한강 차집관로 보수공사 사업비 지원 요청에 대하여 검토 보고드림

▢ 관련근거

○ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제24조(시설물의 보수·보강 등)

- 하수관로·맨홀조사 및 상태등급 판단기준 표준매뉴얼(2017,환경부)

○ 중대재해 처벌 등에 관한 법률 제4조(사업주와 경영책임자등의 안전 및 보건 확보의무)

○ 재난 및 안전관리 기본법 시행령 제74조(재난관리기금의 용도)

○ 서울특별시 재난관리기금의 설치 및 운용조례 제5조(용도)

- 자연재해대책법 시행령 제55조에 따른 방재시설(하수도법 제2조제3호에 따른 하수도 중 하수관로) 등 방재목적 시설의 긴급을 요하는 설치 및 보수·보강

▢ 사업개요

○ 사업명: 난지수계(한강) 차집관거 보수공사

○ 사업비: 1,200백만원

○ 규  모: 한강 차집관로 단면보수 L=280m (2,016㎡)

- ********************* □1.8×1.8, L=280m

슬래브 철근노출	벽체 철근노출

○ 보수공사 사유(난지물재생센터): ’20년 용역 결과 보수가 필요한 관거 중 긴급도를 고려하여 금회 보수대상 구간으로 선정됨

※ **********************

- 하수암거 특성을 고려하여 물돌리기 비용 등 함몰비용이 높은 점 등에 따라 보수가 필요한 관거의 전체보수를 하는 것으로 적용하였고, 긴급도를 고려하여 금회 보수대상 구간을 산정함. 또한 한강본류 암거의 경우 대부분이 구조물 내구연한을 초과한 상태로 물막이 및 물돌리기 가능 연장을 고려하여 인근 관로까지 보수를 시행하여 구조물 내구연한을 증대시키는 것이 타당할 것으로 판단됨

▢ 난지 물재생센터 차집관로 사업 현황

○ 난지 차집관로: 95km

(단위:m)	계	원형관	박스관	U형관
난 지	95,485	19,493	44,147	31,845

○ 예산: 126억원 감액

구 분			2021	2022	비 고 (단위:천원)
공기업하수도사업 특별회계			922,192,000	865,407,992	△56,784,008
	난지물재생센터		95,196,162	82,514,318	△12,681,844
		차집관로 보수공사	7,430,000	11,100,000	3,670,000

○ (’22년) 차집관로 사업 현황

- 예산: 11,100백만원(공기업하수도특별회계)

구 분		보수·보강	예산 (백만원)	비 고
난지	차집관로 보수공사	계	******
		하수차집시설물 유지보수 공사	***	연간단가
		난지수계 차집관로 준설(준설토 포함)	***	연간단가
		난지수계 차집관로 보수공사(한강 L=800m)	*****	‘20 내부조사 용역 결과 (일부)보수
		난지수계 차집관로 보수공사 (불광천,홍제천 L=1,100m)	*****	‘20 정밀점검 용역 결과 (일부)보수

※ 난지수계(불광천/홍제천) 차집관거 보수공사 1,900백만원(재난관리기금) 별도 시행중

▢ 검토의견(물재생시설과)

○ 차집관로는 하수처리장으로 연결되는 간선관로로 30년 경과에 따른 노후화로 인한 파손 등이 발생하고 있기에,

○ 전체적인 점검 및 보수로 인한 유지보수에 막대한 예산이 소요됨에 따라 연차별로 보수를 시행하고 있음

○ 난지물재생센터 차집관로 사업비를 증액하였음에도 ’21년 정밀점검 및 기술진단결과 발견된 보수물량 시행하기에 턱없이 부족(’22년 5월 기준 잔여 물량: 11.4km)

’22년도 특별회계(공기업 하수도) 예산은 약 8,654억원으로, 전년대비 567억원(약6%) 감소하였으며, 난지물재생센터 또한 126억원(약13%) 감소

○ 따라서 난지수계 총 1,210m를 긴급 보수함으로써 차집관로 유지관리에 만전을 기하고자 함

▢ 향후일정

○ ’22.6.: 재난관리기금 심의

○ ’22.7.~8.: 계약심사 및 공사발주

○ ’22.9.~12.: 공사 시행