문서번호	도시철도사업부-22849
결재일자	2022. 6. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공정관리과장	도시철도사업부장
정광욱		최문기	06/10
			이철
협조	공사지원과장		조병연
	주무관		제대영

- 신림선 도시철도 민간투자사업 전면책임감리용역(2공구) -

물가변동으로 인한 계약금액 조정 검토(총괄 13회, 6차 2회)

2022. 6.

도시기반시설본부

(도시철도사업부)

- 신림선 도시철도 민간투자사업 전면책임감리용역(2공구) -

물가변동으로 인한 계약금액 조정 검토(총괄 13회, 6차 2회)

신림선 도시철도 전면책임감리용역(2공구)의 물가변동에 따른 계약금액 조정 요청에 대한 검토 보고임

□ 용역 개요

□ 용 역 명 : 신림선 경전철 민간투자사업 전면책임감리용역(2공구)

□ 계 약 자 : ㈜유신 외 2개사

□ 계약현황

(단위:천원, 부가세포함)

구분	계약일	용역 기간	계약금액	비 고
총괄	2011.10.24.	2011.11.01. ~ 2022.03.07.	3,700,000
1차	2011.10.24.	2011.11.01. ~ 2017.07.28.	335,379	준공
2차	2017.07.26.	2017.07.29. ~ 2018.04.03.	334,680	준공
3차	2018.04.03.	2018.04.04. ~ 2019.05.21.	691,000	준공
4차	2019.05.21.	2019.05.22. ~ 2020.04.03.	673,000	준공
5차	2020.03.10.	2020.03.17. ~ 2021.04.19.	954,300	준공
6차	2021.04.15.	2021.04.20. ~ 2022.06.28.	711,641	진행중

□ 검토 내용

□ 물가 변동으로 인한 계약금액 조정

- 관련 근거

□「지방자치단체 용역계약 일반조건」제5절(용역의 착수 및 보고), 제6절(과업내용의 변경, 물가변동으로 인한 계약금액의 조정)

□「지방자치단체 용역계약 특수조건」제8조(물가변동으로 인한 계약금액 조정)

□「신림선 도시철도 민간투자사업 실시협약」제57조(건설보조금)

□ 입찰공고 (서울특별시 재무공고 제2011-1113호, ´11.09.21.)

- 조정방법 : 소비자물가지수 변동율 적용

- 소비자물가지수 변동율 : 17.71%

□ 기준시점(´11. 07. 31.) 소비자물가지수 : 90.102

□ 비교시점(´22. 03. 31.) 소비자물가지수 : 106.060

※ 소비자물가지수 변동율 산출

소비자물가지수 변동율 =	(비교시점 소비자물가지수 – 기준시점 소비자물가지수)	× 100
	기준시점 소비자물가지수

=	(106.060– 90.102)	× 100	= 17.71%
	90.102

□ E/S 적용 현황

(단위 : 천원)

구 분	E/S(물가 변동) 대상 금액 산출						변동율 (%) (4)	조정액 (3)×(4)=(5)	적용금액 (부가세포함)
	조정대상 금액 (1)	제외 금액				E/S 대상금액 (1)-(2)=(3)
		소계 (2)	기집행 (준공분)	손해배상 공제료	부가세
총괄 (13회)	3,700,000	3,698,159	3,458,439	16,243	20,316	203,161	17.71	35,900	39,490
6차 (2회)	711,641	709,800	470,080	16,243	20,316	203,161	17.71	35,900	39,490

※ 투입계획 현황(변경 없음)

구 분		총괄 용역		6차 용역		비고
		당 초	변 경	당 초	변 경
계		306.34 인․월	변경 없음	57.833 인․월	변경 없음
상주감리원		275.71 인․월	변경 없음	52.043 인․월	변경 없음
기술지원감리원		30.63 인․월	변경 없음	5.79 인․월	변경 없음
토목	수석감리사	′16.09.08 ~ ′22.06.28 (88.58 인․월)	변경 없음	′21.04.20 ~ ′22.06.28 (18.223 인․월)	변경 없음	총괄
	감리사	′16.09.08 ~ ′22.06.28 (69.70 인․월)	변경 없음	′21.04.20 ~ ′22.06.28 (14.34 인․월)	변경 없음	보조
	감리사	′18.09.13 ~ ′21.10.12 (37.00 인․월)	변경 없음	′21.04.20 ~ ′21.10.12 (5.78 인․월)	변경 없음	보조
	감리사보	′17.07.03 ~ ′22.01.04 (42.87 인․월)	변경 없음	′21.04.20 ~ ′22.01.04 (6.70 인․월)	변경 없음	보조 (안전전담)
	감리사보	′20.02.04 ~ ′20.09.23 (6.06 인․월)	-	-	-	보조 (前안전전담)
건축	감리사	′19.04.01 ~ ′21.03.31 (24.00 인․월)	-	-	-	보조
	감리사보	′21.04.01 ~ ′22.01.17 (7.50 인․월)	-	′21.04.20 ~ ′22.01.17 (7.00 인․월)	변경 없음	보조

□ 물가변동에 따른 계약금액 조정

(단위 : 천원, 부가세 포함)

구 분	계약금액 ①	조정금액			변경 계약금액 (①+②)
		소 계 ②	단수 조정	물가변동
총괄 (13회)	3,700,000	증)37,649	감)1,841	증)39,490	3,737,649
6차 (2회)	711,641	증)37,649	감)1,841	증)39,490	749,290

□ 조치 계획

□ 효율적인 과업 수행을 위해 상기 검토내용과 같이 총괄 및 6차 감리용역을 변경하고자 함

□ 용역 변경 내용

(단위 : 천원, 부가세 포함)

구분	당 초		변 경		비 고
	계약기간	계약금액	계약기간	계약금액
총괄 (13회)	´11.11.01~ ´22.06.28	3,700,000	´11.11.01~ ´22.06.28	3,737,649	<변경내용> - 계약금액 : 증)37,649 <변경사유> - 물가변동 등 반영 : 증)37,649
6차 (2회)	´21.04.20~ ´22.06.28	711,641	´21.04.20~ ´22.06.28	749,290	<변경내용> - 계약금액 : 증)37,649 <변경사유> - 물가변동 등 반영 : 증)37,649

붙  임   1. 감리단 공문(관련 서류) 1부

2. 변경 설계내역서(총괄 13회, 6차 2회) 각 1부.  끝.