문서번호	아이돌봄담당관-23465
결재일자	2022. 6. 10.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

			시 민
주무관		거점조성팀장	아이돌봄담당관
이승현		김삼성	06/10
			김연주
협조

「5호(성북) 거점형 키움센터 조성공사」

건설폐기물 운반 및 처리용역 계약변경 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 6.

여성가족정책실

(아이돌봄담당관)

「5호(성북) 거점형 키움센터 조성공사」

건설폐기물 운반 및 처리용역 계약변경 검토보고

「5호(성북) 거점형 키움센터 조성공사」 준공에 따라 건설폐기물 최종 처리물량 검토 후 계약금액에 실제 배출 물량 적용을 위한 변경계약(감액)이 필요하여 검토보고 드림

1		용역개요

ㅇ 용 역 명 : 5호(성북) 거점형 키움센터 조성공사 건설폐기물 운반 및 처리용역

ㅇ 위    치 : 성북구 회기로3길 17 (종암동 28-358)

ㅇ 용역기간 : '21. 12. 09. ~ '22. 05. 07.

ㅇ 용역금액 : ***********

ㅇ 용 역 사 : ***************

ㅇ 용역내용 : 건설폐기물 수집·운반 및 처리

2		추진경위

ㅇ '21. 12. 23. : 공사 착공

ㅇ '22. 01. 17. : 폐기물 반출 착수

ㅇ '22. 05. 06. : 건설폐기물 처리용역 준공신고

ㅇ '22. 05. 21. : 공사 준공

3		계약변경 내용

ㅇ 관련근거

- 용역계약 일반조건 제6절(계약금액 조정)

- 건설폐기물 처리용역 준공검사 검토보고(아이돌봄담당관-22246, '22.5.11.)

ㅇ 계약변경 사유

- ***********************************************************************************

ㅇ 변경내용

- 물량 변경

구 분	단위	수량			비고
		변경 전	변경 후	증·감
건설폐재류	ton	*******	******	*******
혼합건설폐기물(폐유리)	ton	*****	*****	*
혼합건설폐기물(폐보드)	ton	*****	*****	*

- 용역금액 변경

(단위: 원)

구 분		단위	변경 전		변경 후		증감액
			수량	금액	수량	금액
처리비	건설폐재류	ton	*******	*********	******	*********	**********
	혼합건설폐기물	ton	*****	******	*****	******	*
	혼합건설폐기물	ton	*****	*********	*****	*********	*
운반비	건설폐재류	ton	*******	*********	******	*********	********
	혼합건설폐기물	ton	******	*********	******	*********	*
소 계				**********		**********	**********
부가세				*********		*********	********
합 계				**********		**********	**********

- 계약기간: 변경없음

4		처리의견

ㅇ ***************************************************************************************************

붙임 : 계약변경 관련서류 1부.  끝.