문서번호	도시철도계획부-22453
결재일자	2022. 6. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	도시철도설계과장	도시철도계획부장		도시철도국장
이민호	강명석	정대현		06/13
				하종현
협 조

도시철도 9호선 4단계 연장사업 건설공사 가시설 강재 및 복공판 적용 검토 보고

2022. 6.

도시기반시설본부

(도시철도계획부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	■	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

도시철도 9호선 4단계 연장사업 건설공사

가시설 강재 및 복공판 적용 검토 보고

「도시철도 9호선 4단계 연장사업」건설공사와 관련하여 가시설 강재 및 복공판(주형보) 적용에 대한 검토 결과를 보고 드림

1		사업개요

□ 전체 사업개요

o 사 업 명 : 서울도시철도 9호선 4단계 연장사업

o 사업위치 : 강동구 중앙보훈병원 ~ 고덕역(5호선) ~ 고덕강일1지구

o 사업규모 : 총 연장 4.1km, 정거장 4개소

o 사업기간 : 2018. ~ 2028.

o 총사업비 : 6,408백만원(국비 2205, 시비 3307, SH 896)

□ 공사개요

o 입찰방법 : 설계·시공 일괄입찰

o 공사기간 : 착공일로부터 2,400일(80개월)

o 총공사비 : 506,854백만원

(단위:백만원)

구 분	1공구	2공구	3공구	계
규 모	· 연 장 1,348m · 정거장 1개소	· 연 장 1,290m · 정거장 2개소	· 연 장 1,486m · 정거장 1개소	· 연 장 4,124m · 정거장 4개소
공사비	148,749	224,830	133,275	506,854

2		추진배경

□ 2공구 실시설계적격심의 결과(′22.04. 기술심사담당관)

o 심의결과 : 적격(설계점수 87점)

o 의결사항 : 토목시공분야 발주기관 지적사항 미반영사항 2건에 대해 발주부서 및 적격업체가 협의하여 판단

구 분	발주기관 지적사항	실시설계적격자 의견
가시설 강재	시공상의 안정을 위해 가시설 강재는 신강재 사용 (입찰안내서 P4-73)	계약목적물을 형성하지 않는 가설재료 등은 기사용 자재 사용 가능 (입찰안내서 P4-64)
복공판 주형보	활하중 DB-24 등 안정을 고려하여 2m 복공판 및 주형보 사용 (설계기준 P86)	용도에 따라 폭과 길이를 변경할 수 있으므로 3m 복공판 등 사용 가능 (설계기준 P85)

3		검토사항

□ 변호사 법률검토 결과(′22.05.)

***************************************************************************

*******************************

【시 지정 법률자문 변호사 의견】

구 분	변호사 자문의견
******	*************** ******************************************************************************************************************
*** ***	********************* **********************************************************************************

【실시설계적격자 법률자문 변호사 의견】

구 분	변호사 자문의견
******	********************* *******************************************************************************
*** ***	************************ ************************************************************************************************

□ 전문가 자문회의 결과(′22.06.)

*****************************************************************************************

********************************

*************************************************

**********************************************

< 자문위원별 자문내용 >

분야	위원	자문내용
		가시설 강재	복공판
****	***	*********	*****************
	***	*********	************
	***	**************	************
****	***	*********	*****************
	***	*********	*****************
	***	**************	*****************
****	***	**************	*****************
	***	*********	*****************

□ 가설공사 표준시방서 개정(′18.6. 국토교통부)

o 이전 표준시방서에서는 길이 2m 복공판을 표준으로 규정하였으나,

복공판 규격(주형 간격)의 다양화 및 기술 향상을 위해 개정

구분	이전	현행	개정사유
노면복공	복공판의 규격은 길이 2m의 공장제품을 표준으로..	설계기준 상의 하중조건에 구조 안전성을 확보하는 제품	복공판 규격을 제한하면 주형 간격이 제한되며 새로운 제품개발에 영향을 미칠 수 있어서 삭제

□ 국내 대형공사장 현장여건

o 코로나19 장기화에 따른 중국 봉쇄정책 및 우크라이나 사태 등으로 인한 건설 원자재 가격 폭등 및 자재 수급 불안

o 건설 원자재 단가 조정 등을 요구하는 철근, 콘크리트 등 골조공사

전문업체 대규모 파업 장기화 전망

▶ 원자재가 폭등, 건설현장‘4차 셧다운’위기(매일일보, ′22.5.11.)

▶ 자잿가 폭등에 휘청이는 건설현장... 공사중단 사태까지(연합뉴스, ′22.4.20.)

▶ 치솟는 원자재값... 건설현장‘2차 파업’예고(서울경제, ′22.3.28.)

4		검토결과

************************

***********************************************************************************

*************************************************************************************************************************

************************************************************************

********************

************************************************************************

**********************************************************************

5		향후계획

************************

****************************************

*******************************************************

붙임  전문가 자문회의 결과 보고 1부.  끝.