문서번호	도시철도계획부-22454
결재일자	2022. 6. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도시철도설계과장	도시철도계획부장
김민석		강명석	06/13
			정대현
협조

9호선 4단계 지하안전영향평가용역

준공기한 연기 검토 보고

2022. 6.

도시기반시설본부

(도시철도계획부)

9호선 4단계 지하안전영향평가용역

준공기한 연기 검토 보고

서울도시철도 9호선 4단계 연장사업 건설공사 지하안전영향평가용역의 준공기한 연기에 대한 검토결과를 보고드림

□ 용역개요

ㅇ 위    치 : 서울특별시 강동구 중앙보훈병원~고덕 강일1지구

ㅇ 규     모 : 굴착규모 58,153㎡ (지하굴착: 31,309㎡, 터널굴착:26,844㎡)

ㅇ 용 역 비 : 139,569천원

ㅇ 용역기간 : 2021. 10. 20. ~ 2022. 6. 16.

ㅇ 용 역 사 : ㈜브니엘컨설턴트

□ 추진경위

ㅇ	'20.12.	:	9호선 4단계 연장사업 입찰공고
			*************************
ㅇ	'21.10.20	:	지안평용역 계약 및 착수
ㅇ	'21.11.~	:	설계자료 검토
ㅇ	'22. 6. 현재	:	공구별 단면해석 검토 및 보고서 작성중
			- 설계VE 완료(2공구 1월, 1,3공구 4월) 후 단면해석 진행중

□ 준공기한 연기

ㅇ 준공기한 연기 요청 (브니엘 22-060-05호, ‘22. 6. 9. )

ㅇ 연기사유

************************************************************************************************

************************************************************************************************************

ㅇ 연기 귀책소재 : ************************

ㅇ 용역기간 변경

*****	**	**	**
****	***************************	****************************	*******

※ 계약금액 변동 없음

□ 조치계획

ㅇ 상기와 같이 준공기한을 연기 시행하여 용역추진에 만전을 기하고자 함.

붙임  1. 준공기한 연기요청(공문) 1부.

2. 첨부서류(준공기한연기원, 실정보고, 합의각서) 각 1부.  끝.