문서번호	기전설비과-21362
결재일자	2022. 6. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	시설부장
이재돈		김상동	06/14
			박상보
협조

한강공원 CCTV 설치 통신공사

건설폐기물처리용역 준공기한(연장) 검토 보고

2022. 6.13

한강사업본부

(기전설비과)

한강공원 CCTV 설치 통신공사

건설폐기물처리용역 준공기한(연장) 검토 보고

한강공원 CCTV 설치 통신공사 건설폐기물처리용역의 준공기한(연장)에 대한 검토 보고임.

Ⅰ		용역개요

○ 용 역 명 : 한강공원 CCTV 설치 통신공사 건설폐기물 처리용역

○ 대표 계약자 : ㈜진흥이엔티

**************************

******	***********	***********
******	******	***
******	**************** ******************* *****	*****************
****	***********	************

○ 계 약 일 : 2022. 3.23

○ 계약금액 : 10,021,550원

○ 계약기간 : 2022. 3.24 ~ 2022. 6.30

○ 규    모

- 폐아스콘 수집운반 : 113.41㎥

- 폐아스콘 중간처리 : 267톤

Ⅱ		준공기한(연장) 검토

○ 준공기한(연장) 변경

- 당 초 : 2022. 6.30

- 변 경 : 2022. 7.29

○ 준공금액 : 변경없음

○ 준공기한(연장) 변경 사유

- ****************************************

○ 예산과목

- *******************************************

*************

Ⅲ		행 정 사 항

○ 상기 용역에 대한 준공기한(연장) 변경계약을 의뢰(총무과).

붙 임  합의각서 1부.  끝.