문서번호	건축부-24676
결재일자	2022. 6. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		의료시설과장	건축부장
손남기		정채문	06/14
			신명승
협조

-시립마포 실버케어센터 건립공사-

계약금액변경(총차 및 3차) 검토보고

2022. 6.

도시기반시설본부

(건  축  부)

-시립마포 실버케어센터 건립공사-

계약금액변경(총차, 3차) 시행 검토보고

「시립마포 실버케어센터 건립공사」와 관련, 건설사업관리단으로부터 제출된계약금액변경(총차, 3차) 요청 건에 대하여 검토 후 보고드림.

- 내역변경 및 제경비 정산 : 감) 387,772,000원

1		사업개요

○ 위    치 : 서울특별시 마포구 백범로 21 (舊, 한국산업인력관리공단 )

○ 규    모 : 지하2층/지상4층, 연면적 12,271㎡

○ 공사기간 : (3차) '21.01.16. ~'22. 6.14. (총차  :‘19.04.15. ~ '22.6.14.)

○ 공 사 비: (3차)금9,905,584,000원  (총차 : 금17,128,584000원)

○ 시 공 사 : 혁성공영㈜, ㈜태왕이앤씨

2		추 진 경 위

○ ‘19. 04. 15. : 공사착공

○ ‘19. 05. 15. : 설계용역 준공

○ ‘20. 02. 20. : 골조공사 완료

○ ‘22. 6월 현재.  현장정리 및 청소

3		설계변경(공사금액 변경) 검토

○ 관련근거

- 건축부-23652('22.5.24)호 "설계변경자문 개최결과 보고"

- 업무연락전 도기본-22-666('22.6.3.) "설계변경 자문 지적사항 조치결과 승인통보

- 혁성실비케어-22-062(`22.6.7) 각종보험료 등 정산서 제출의 건

- 유탑(마실)제22-79(`22.6.13)호 "공사금액 조정요청에 대한 적정성 검토보고

□ 계약금액 변경

구 분	공 사 금 액			검토결과
	당초 계약금액	변경 계약금액	증/감액
****	**************	**************	************	**
****	*************	*************	************	**

□ 주요 변경 내용

구 분		변경금액			관련근거	비고
		변경전	변경후	증/감
*****	**	*************	************	***********	************* ***************************
	**	*************	*************	*********	********************** ******************
	**	***********	***********	***********	************ ****** *****************
	*	**************	**************	***********
***		*************	*************	************	**********
*** *******		**************	**************	************
***		***********	***********
**** ***			**********	**********	************ ***************************
****		**************	**************	************

4		건설사업관리단 검토의견

○ 혁성공영(주)에서 제출한 설계변경 내역서를 검토하여 본 결과 설계변경 금액이 적정하게 산출되어 공사금액이 적정한 것으로 사료됨

5	c	처 리 의 견

○ 총무부에 계약변경 의뢰하고자 함

붙임: 1. 공사금액 조정요청에 대한 적정성 검토보고(건설사업관리단) 1부

2. 설계변경 내역서(총차 및 3차) 각 1부

3. 제비율 검증확인서 1부. 끝.