문서번호	총무과-27429
결재일자	2022. 6. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
김현욱		성호준	06/15
			이계열
협조

- 서소문청사 자동제어설비(전력 및 조명) 개선을 위한 -

자동제어설비 전기공사 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 6.

행 정 국

(총무과)

- 서소문청사 자동제어설비(전력 및 조명) 개선을 위한 -

자동제어설비 전기공사 계획 보고

서소문청사의 노후된 자동제어설비(전력 및 조명) 개선을 위한 전기공사 계획을 아래와 같이 보고 드림.

Ⅰ		공 사 개 요

□ 공 사 명: 서소문청사 자동제어설비(전력 및 조명) 전기공사
□ 공사위치: 1동, 2동, 3동, 5동, 후생동 EPS실 및 각 층 분전반
□ 공사내용: 자동제어설비(전력 및 조명) 교체를 위한 전기공사
□ 공사기간: '22. 6. 18. ~ 8. 31.
□ 공사업체: (주)금정엔지니어링 [2022년도 전기공사 연간단가 업체]

Ⅱ		예 산 집 행

************************
***************************

Ⅲ		향 후 계 획

□ '22. 6. 18. ~ 6. 26.: 서소문청사 자동제어설비 연계용 광케이블 포설공사
□ '22. 7. 9. ~ 8. 21.: 서소문청사 자동제어설비(전력 및 조명) 교체공사
□ '22. 8. 22. ~ 8. 30.: 서소문청사 자동제어설비(전력 및 조명) 시운전
□ '22. 8. 31.: 서소문청사 자동제어설비(전력 및 조명) 설치 완료

붙임  1. 설계내역서 1부.
2. 예정공정표(안) 1부.  끝.