문서번호	건축부-24704
결재일자	2022. 6. 15.
공개여부	부분공개(4,5)
방침번호

					시 민
주무관	문화시설과장	건축부장	시설국장		도시기반시설본부장
양희식	박근우	신명승	권완택		06/15
					이정화
협 조

노들섬 특화공간 조성공사

민사소송 화해권고결정에 따른 추진 계획 보고

2022. 6.

도시기반시설본부

(건 축 부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료, 빅데이터 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

노들섬 특화공간 조성공사

민사소송 화해권고결정에 따른 추진 계획 보고

「노들섬 특화공간 조성공사」민사소송 화해권고결정에 대하여 검토 후 수용하고, 운영부서(문화정책과)에서 소송 판결금을 확보 후 지급토록 처리하고자 함

1		사업개요

❍ 사 업 명 : 노들섬 특화공간 조성공사

❍ 위     치 : 용산구 이촌동 302-6, 146 일대 (노들섬)

❍ 총 공사비 : 57,300,000,000원

❍ 공사기간/금액 : '17.10.26.~'19.11.30. / ***************(건축,조경)

❍ 감리사/시공사 : (주)유탑엔지니어링건축사사무소 외 1 / ***********(건축,조경)

2		민사소송 개요

□ 사건명 : *********************

❍ 원    고 : *******

❍ 피    고 : *****

❍ 사건개요 : *****************************************************************************

❍ 청구금액 :*************

□ 민사소송 추진경위

❍ 2020. 1.23. : 소장접수

❍ 2020. 4.21. : 답변서 제출

❍ 2020. 5.~ 8. : 1~3차 변론

❍ 2020. 9. 8. : 감정을 위한 전문심리위원 참여 결정

❍ 2021. 4.~ 6. : 4~5차 변론

❍ 2021.10.28. : 감정인 감정자료 제출

차수	변경사유	시공사 요구 (소장내용)	감정결과		비고
			원고의견반영 (시공사)	피고의견반영 (서울시)
2차	****** *************************	************	***********	***********
	****** ******************************************		***********	***********
3차	****** **************************************	***********	***********	*
합계		************	************	************

❍ 2022. 5.20. : 6차 변론

❍ 2022. 5.23. : 화해권고 결정

※ 화해권고결정

: *******************************************

※ 소송대리인 의견 (****************************)

: *********************************************************************************************************************************************************************

❍ 2022. 6. 9. : 종국 (화해권고 결정)

3		화해권고결정사항

□ 결정사항

***********************************************

********************************************************************************************************

**********************

*******************

4		*********** 및 결정금 지급계획

□ ***********

*****************

**************************************************

****************************************

*****************************************************************************************************************************************************************************

**************************************************************************

□ 결정금액 지급계획 (※ 예비비 사용 계획)

❍ 현 노들섬 운영부서인 문화정책과에 별도의 예비비 확보·지급처리 요청

- **********************

- *********************

❍ 예비비 사용근거

- 지방재정법 제43조(예비비)

- 서울시 재무회계규칙 제19조(예비비의 사용)

5		행정사항

□ 예비비 신속 확보 및 결정금 집행 요청

❍ 운영부서(문화본부 문화정책과)로 예비비 신속 확보 및 결정금 집행 요청

붙임: 1. 화해권고결정문 1부.

2. 소송대리인(변호사) 의견서 1부.  끝.