문서번호	급수운영과-25603
결재일자	2022. 6. 16.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

					시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장	중부수도사업소장
이용민	이훈재	채재일	대결 06/16
			최진경
협 조
	주무관			정은희

공사 준공기한 연기 보고          (2021년 중구,용산구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사)

2022. 6.

중부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

공사 준공기한 연기 보고

(2021년 중구,용산구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사)

『2021년 중구,용산구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사』의 계약금액 미도래 및 절대 공기 부족에 따라 공사시행에 어려움이 초래되는 바 원활한 상수도시설물 설치의 연속성을 위하여 현재 진행중인 공사 준공 기한을 연기 하고자 함.

□ 공사 현황

○ 공 사 명: 2021년 중구,용산구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(장기계속)

○ 공사개요: 밸브교체 및 변실설치 D=80~700㎜. *********

○ 공사기간: 2021. 6. 25. ~ 2022. 6. 30.

○ 계약금액: *****************************

○ 도 급 자: *****************

○ 예산집행 예정금액                                    (단위:천원)

구분	계약금액	기집행금액 (21년12월)	집행예정액 (22년6월)	집행잔액	공정률	비고
도급비	*******	*******	*******	*******	*****

□ 2022년 공사 발주 현황

○ 공 사 명: 2022년 중구, 용산구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사

○ 공사개요: 밸브교체 및 변실설치 D=80~700㎜. N=***개소 등

○ 발주금액(도급비): *******천원

○ 공사기간: 착공일로부터 ~ 2023. 6. 30까지 [장기계속]

○ 세부 추진 현황

- 계약심사의뢰(본부 안전조사과)............................................ 2022. 5.  9.

- 전문공사 발주 사업 사전 검토 완료(본청 건설혁신과)........ 2022. 5. 17.

- 공사발주 및 계약의뢰(본청 재무과)...................................... 2022. 5. 19.

- 입찰 공고(본청 재무과)......................................................... 2022. 5. 24.

- 개찰 완료(본청 재무과)......................................................... 2022. 5. 31.

- 현재 적격심사 중, 적격심사 완료 및 계약............................. 7월 중 예정

□ 준공 기한 연기 개요

○ 준공 기한 연기

- 당초: 2021. 6. 25~ 2022. 6. 30.

- 변경: 2021. 6. 25~ 2022. 8. 31.

○ 연기 사유

- 『2021년 중구, 용산구 상수도시설물 설치 및 보수공사(장기계속단가계약)』의 계약금액 미도래(공정률:****%) 및 긴급으로 작업지시한 5건(노후밸브정비: 3건, 환경정비: 3건)은 현재 작업 진행중이며 준공기한 내 완공이 어러운 실정으로 절대 공기 부족에 따른 공사기간 연장이 필요함.

○ 귀책사유: 중부수도사업소

○ 지체상금 부과: 미부과

□ 조치의견 및 행정 사항

○ 상기 내용과 같은 실정으로 공사기간을 연장하여 상수도시설물 설치공사의 원활하게 이루어지도록 최선을 다하고자함.

○ 행정지원과에 준공 기한 연기(변경계약) 요청.  끝.