문서번호	급수운영과-24780
결재일자	2022. 6. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
조승수		서규석	06/16
			고신석
협 조
	주무관			김윤환
	주무관			이성교
	주무관			권기진

[변경]관악구 봉천동 1688-128 일대

(이중화 공사) 및 (노후배관 정비)

종합계획 보고-차수별 공사

2022년 6월

남부수도사업소

(급수운영과)

[변경]관악구 봉천동 1688-128 일대

(이중화 공사) 및(노후배관 정비) 종합계획 보고

관악구 봉천(인헌)동 1688-128 일대(낙성대역~까치고개) 사이의 수계전환에 필요한 이중화공사 시행 및 노후배관 정비관련 종합 추진계획을 보고 드림.

※급수운영과-23810(2022.05.30)호 보고서의 [변경]자료입니다.

Ⅰ		현 황

□ 근거

○ 2022년 장기사용 배급수관 정비계획(누수대응과-130호, 2022. 01. 04.)

- 자체 추진계획 수립 및 이행

□ 공사 개요

○ 위치: 관악구 봉천동 1688-128 일대 (낙성대역~까치고개 사이)

○ 이중화 관로공사 필요성

- 비상 및 긴급공사시 대처 가능한 이중화 관로 신설 필요성

- 봉천6-2 배수지 와 봉천11(대)배수지의 상호보완 완충적 기능부여

○ 노후배급수관 정비 필요성

- 정비대상 노후관로 및 미완료 공사구간(무라이닝)의 개량공사 실시

□ 변경 검토사유

○ 지장물등 간섭

- 당초 인도부분에 부설된 관로를 횡단후 기존 배수관의 직접분기를 검토

하였으나, 분기를 하더라도 정비대상 년도가 도래한 노후관을 정비할시

인도 부분에 부설된 지장물의(하수,통신,전기,가스 등) 간섭으로 정상적인

교체가 불가할것으로 판단됨

- 이에, 이중화 관로공사의 횡단 작업구간과 노후관 작업구간을 연계하여

차도부분에서 정비 개량작업(정자분기 시행)코자 함

○ 위치도

○ 지장물 사진대지

통신박스 구간	전기박스 구간

Ⅱ		정비추진 계획

□ 관로현황

구분	구경	연장	공사내용	비고
1차공사	D200	L=20m	이중화 관로공사	2021년 계약업체 (2022년 시행)
2차공사	D200	L=100m	노후배관 정비공사	2022년 계약업체 (2022년 시행)
3차공사	D200	L=80m	노후배관 정비공사	2023년 계약업체 (2023년 시행)
계	D200	L=200m

○ GIS 상세도(#1차,2차공사)_2022년 상반기 시행

- 비상 및 긴급공사시 대처가능한 배수관 신설 검토필요

- 횡단 연결공사를 통해 봉천11(대) 및 봉천6-2 수계의 탄력적 운용가능

- 정비년도(84년/85년) 도래한 노후관 교체작업 필요(2022년 하반기굴착통제)

○ GIS 상세도(#3차공사)_2023년 하반기 시행

- 무라이닝관 교체를 통한 적수민원 차단

- 도로굴착 통제로 인해 중간밸브 이후 미작업구간 공사

- 1,2차 공사(2022년)와 연결하여 공사완료(2023년 하반기)

□ 정비 방법

1. 정비 방향: 사업구간#1,2 → 사업구간#3

2. 시험확인 굴착실시

- 지하매설물 현황파악

- 무분별한 굴착남용 방지

3. 이중화 관로 횡단작업 (신설)구간공사

- 단수 수반 시, 사전 수계전환 실시

- 횡단공사로 차량통제 및 안전사고방지 철저

4. 배수관 관로 (개량)구간공사

- 정자분기 실시

- 노후관 관로정비공사

- 무라이닝관 개량공사

- 다용도 밸브 및 중간밸브 설치 실시

5. 현장정리

- 퇴수작업으로 민원발생 차단 (기존관로 부분 퇴수변 설치 #2 사업구간)

- 현장정리

※ 굴착 구간은 즉시 포장복구의뢰 복구 조치(당일 복구)

□ 추진 일정

[사업구간 1차공사]

○ ’22. 5월말 ...... 도로굴착승인 요청 및 유관기관 협의

○ ’22. 5월말 ...... 관급자재 구매 및 안전시설 조치방안 강구

○ ’22. 6월초 ...... 1차 작업(횡단)구간 실시(야간공사)

○ ’22. 6월초 ...... 현장정리 및 관급자재 정산

○ ’22. 6월중 ...... 공사완료 보고예정(내부 과장결재보고)

- 위치: 관악구 봉천동 1656-1 (남부순환로 1956일대)

- 개요: 이중화 배수관 관로공사

- 기간: 2022. 5. 30. ~ 6. 15.

- 예산: 20백만원(시설비_소블럭 배급수관망개선)

- 공사의 시급성을 감안,「2021 청룡동외 9개동 상수도공사(장기계속)연간단가 업체」작업지시

[사업구간 2차공사]

○ ’22. 6월중 ...... 도로굴착승인 요청 및 유관기관 협의

○ ’22. 6월중 ...... 관급자재 구매 및 안전시설 조치방안 강구

○ ’22. 6월말 ...... 2차 작업(개량)구간 실시(야간공사)

○ ’22. 7월초 ...... 현장정리 및 관급자재 정산

○ ’22. 7월초 ...... 공사완료 보고예정(내부 과장결재보고)

- 위치: 관악구 봉천동 1656-1 (남부순환로 1956일대)

- 개요: 노후배관 공사

- 기간: 2022. 6. 16. ~ 7. 10.

- 예산: 30백만원(시설비_장기사용 배급수관 정비)

- 공사의 시급성을 감안,「2022 청룡동외 9개동 상수도공사(장기계속)연간단가 업체」작업지시

[사업구간 3차공사]

○ ’23. 9월말 ...... 도로굴착승인 요청 및 유관기관 협의

○ ’23. 9월말 ...... 관급자재 구매 및 안전시설 조치방안 강구

○ ’23. 10월초 ...... 3차 작업(개량)구간 실시(야간공사)

○ ’23. 10월초 ...... 현장정리 및 관급자재 정산

○ ’23. 10월중 ...... 공사완료 보고예정(내부 과장결재보고)

- 위치: 관악구 봉천동 1656-1 (남부순환로 1956일대)

- 개요: 노후배관 공사

- 기간: 2023. 9. 20. ~ 10. 10.

- 예산: 30백만원(시설비_장기사용 배급수관 정비)

- 공사의 시급성을 감안,「2023 청룡동외 9개동 상수도공사(장기계속)연간단가 업체」작업지시

Ⅲ		행 정 사 항

□ 도로굴착 및 자재구매 등 사전 협의 및 준비 조치

□ 단수가 필요한 작업발생시(검토승인 후 실시)

□ 교통량과 유동인구가 많은 지역으로 안전사고 발생 사전 검토

끝.