문서번호	기전과-23824
결재일자	2022. 6. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
박요셉		06/16
		김은덕
협조
	주무관		이지영

『2022년 동부2구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)』

실정보고 검토 보고(1차 작업지시)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022.  6. 15. (수)

동부도로사업소

(기전과)

『2022년 동부2구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)』

실정보고 검토 보고(1차 작업지시)

2022년 동부2구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)와 관련 감리업체로부터 제출된 실정보고에 대하여 검토하고 보고 드림.

1		관련근거

□ 제1차 작업지시[2022년 동부2구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)]

ㅇ 기전과-21891호(2022.05.02.)

□ 실정보고 제출 건

ㅇ (주)주현이앤씨 주현(동부)2022-014호(2022.06.14.)

2		사업개요

□ 사 업 명 : 2022년 동부2구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)

□ 사업내용 : 송파구, 강동구 교통신호기 유지보수

□ 사업기간 : 2022. 3. 24. ~ 12. 31.

□ 계 약 자 : ㈜엠비에스엔지니어링 대표 강형주

□ 계약금액 : ********************************

□ 감리업체 : ㈜주현이앤씨 대표 이정수

3		제1차 작업지시 내용

□ 작업내용 : 교통신호제어기 및 신호지주 교체 등

□ 작업장소 : 올림픽회관 외 85개소

□ 작업기간 : 작업지시일로부터 ~ 2022. 6. 20.(월)

□ 작업지시 금액 : 금243,319,483원

(금이억사천삼백삼십일만구천사백팔십삼원)

4		실정보고 내용

□ 주요 검토내용

구 분	현황 및 문제점	감리 의견	검토결과	비고
우성 아파트	① 야간공사 소음발생 민원으로 아스팔트 횡단굴착 야간→주간 변경 필요 ② 굴착위치의 지장물(한전주 및 통신맨홀)로 굴착위치 변경 필요	① 현장여건에 맞게 아스팔트횡단굴착 주간으로 변경 반영 ② 굴착위치 변경 및 시공시간 주간으로 변경 반영	적 정
강일동 성당	① 야간공사 소음발생 민원으로 아스팔트 횡단굴착 야간→주간 변경 필요	① 현장여건에 맞게 아스팔트횡단굴착 주간으로 변경 반영	적 정
둔촌 오륜역	① 야간공사 소음발생 민원으로 아스팔트 횡단굴착 야간→주간 변경 필요 ② 선시공된 제어기쪽 배선 2선이 제어기와 연결 안돼있어 연결필요	① 현장여건에 맞게 아스팔트횡단굴착 주간으로 변경 반영 ② 제어기->맨홀간 신호선 2선 재설치 물량 적용	적 정
강명초교	① 차량신호등 기존관로 사용구간 선통불가	① 차량신호등 기존배선 재사용	적 정
천동초교	① 해당구간 지장물로(육교, 한전주, 통신전주, 가로등) 기초설치 불가	① 공사이월	적 정
잠실대교	① 교량구간 기초설치 협의 지연	① 공사이월	적 정
복정역	① 보행신호등 기존관로 사용구간 선통불가	① 일부구간 가공설치	적 정

□ 주요 변경내용

교차로명	품 명	규 격	구분	단위	수량			비 고
					당초	변경	증/감
우성 아파트	전선관 배관	PE Ø54㎜	신설	0	9	0	-9	▼감 1,001,957
	전선관 배관	PE Ø100㎜	신설	m	1	10	9
	후강전선관 배관	Ø104㎜×3.6m(KSC 8401)	신설	m	0	9	9
	후강전선관 배관(야간)	Ø104㎜×3.6m(KSC 8401)	신설	m	9	0	-9
	아스팔트 횡단굴착	기계 80%+ 인력 20%	신설	m	0	9	9
	아스팔트 횡단굴착(야간)	기계 80%+ 인력 20%	신설	m	9	0	-9
	소형고압블럭 굴착배관	기계 80%+ 인력 20%	신설	m	9	0	-9
	일반토사(사리도) 굴착배관	기계 80%+ 인력 20%	신설	m	0	9	9
	아스팔트횡단굴착 교통정리요원배치(주간)	-	신설	hr	0	3	3
	아스팔트횡단굴착 교통정리요원배치(야간)	-	신설	hr	3	0	-3
	지주(Ø200㎜) 기초설치 블록 포장(가복구)	소형 고압블럭 t=6~8cm	신설	EA	1	0	-1
	맨홀(800㎜) 설치 블록 포장(가복구)	소형 고압블럭 t=6~8cm	신설	EA	2	0	-2
	굴착(B=0.6m) 복구 블록 포장(가복구)	소형 고압블럭 t=6~8cm	신설	m	9	0	-9
강일동 성당	후강전선관 배관	Ø104㎜×3.6m(KSC 8401)	신설	m	0	16	16	▼감 1,465,884
	후강전선관 배관(야간)	Ø104㎜×3.6m(KSC 8401)	신설	m	16	0	-16
	아스팔트 횡단굴착	기계 80%+ 인력 20%	신설	m	0	16	16
	아스팔트 횡단굴착(야간)	기계 80%+ 인력 20%	신설	m	16	0	-16
	아스팔트횡단굴착 교통정리요원배치(주간)	-	신설	hr	0	6	6
	아스팔트횡단굴착 교통정리요원배치(야간)	-	신설	hr	6	0	-6
둔촌 오륜역	신호케이블	지중2선(2.5SQ/1.5SQ 공통)	재설치	m	0	5	5	▼감 2,102,293
	후강전선관 배관	Ø104㎜×3.6m(KSC 8401)	신설	m	0	25	25
	후강전선관 배관(야간)	Ø104㎜×3.6m(KSC 8401)	신설	m	25	0	-25
	아스팔트 횡단굴착	기계 80%+ 인력 20%	신설	m	0	21	21
	아스팔트 횡단굴착(야간)	기계 80%+ 인력 20%	신설	m	21	0	-21
	소형고압블럭 굴착배관	기계 80%+ 인력 20%	신설	m	5	9	4
	소형고압블럭 굴착배관(야간)	기계 80%+ 인력 20%	신설	m	4	0	-4
	아스팔트횡단굴착 교통정리요원배치(주간)	-	신설	hr	0	7	7
	아스팔트횡단굴착 교통정리요원배치(야간)	-	신설	hr	7	0	-7
강명초교	신호케이블	지중1선 (F-CVV,1.5SQ/5C)	신설	m	45	14	-31	▲증 160,869
	신호케이블	지중2선 (F-CVV,1.5SQ/5C)	신설	m	13	0	-13
	신호케이블	지중3선 (F-CVV,1.5SQ/5C)	신설	m	5	0	-5
	신호케이블	지중1선 (2.5SQ/1.5SQ 공통)	재설치	m	0	36	36
	신호케이블	지중2선 (2.5SQ/1.5SQ 공통)	재설치	m	0	18	18
	신호케이블	지중1선 (2.5SQ/1.5SQ 공통)	철거	m	23	0	-23
	신호케이블	지중2선 (2.5SQ/1.5SQ 공통)	철거	m	17	0	-17
천동초교	전체물량		식	식	1	0	-1	▼감 2,757,686
잠실대교 남단 진출램프	전체물량		식	식	1	0	-1	▼감 11,898,445
복정역	신호케이블	가공1선	신설	m	0	12	12	▲증 308,240
	조가선	와이어로프(6mm)	신설	m	0	12	12
	애자 및 밴드	지주용	신설	EA	0	2	2
※ 타 세부사항은 실정보고 내역서 참조

5		보고자 의견

□ 감리업체로부터 접수된 실정보고 대하여 검토한 결과 감리의견이 적정한 것으로 판단되어 실정보고를 승인하고 추후 설계변경을 시행하고자 함.

붙임 : 실정보고서 제출 공문 1부.  끝.