문서번호	설비부-24640
결재일자	2022. 6. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로설비과장	설비부장
임현철		문학준	06/16
			김호성
협 조
	주무관			김세익

『로봇과학관 건립 설비공사』

준공기안 연기 검토 보고

2022. 6.

도시기반시설본부

【설 비 부】

『로봇과학관 건립 설비공사』

준공기안 연기 검토 보고

우리 본부에서 시행중인『로봇과학관 건립 설비공사』와 관련 건설사업관리단으로부터 전기,통신,기계,소방공사 1차분(금차) 및 총차 준공기한 연기요청이 있어 검토 보고 드림.

Ⅰ		관련근거

□ 전기,통신 공사기간 변경(연장)요청 [KDU(대외) 제22-127호('22.06.08.)

□ 기계,소방,지열 공사기간 변경(연장)요청 [KDU(대외) 제22-135호('22.06.14.)

Ⅱ		공사개요

□  사업명: 로봇과학관 건립공사

○ 위    치 : 서울특별시 도봉구 창동 1-25

○ 규    모 : 지하2층/지상4층, 연면적 7,308.39㎡

○ 감 리 단 : ㈜종합건축사사무소근정

○ 설비공사 현황

1. 전기공사 : *******

(단위: 원)

구 분	계약금액	공사기간	비 고
총차	*************	***********************	******
1차	**********	***********************

2. 통신공사 : ******

(단위: 원)

구 분	계약금액	공사기간	비 고
총차	***********	***********************	******
1차	**********	***********************

3. 기계설비공사 : *******

(단위: 원)

구 분	계약금액	공사기간	비 고
총차	*************	***********************	********
1차	**********	***********************

4. 소방공사 : ************

(단위: 원)

구 분	계약금액	공사기간	비 고
총차	***********	***********************	******
1차	**********	***********************

Ⅲ		검토내용

□ 계약기간 변경내용

구분	계약업체		공 사 기 간		비고
			당 초	변 경
전기	*****	**	***********************	***********************	*****
		**	***********************	***********************	*****
통신	******	**	************************	***********************	*****
		**	***********************	***********************	*****
기계	*****	**	***********************	***********************	*****
		***	***********************	***********************	*****
소방	**********	**	***********************	***********************	*****
		**	***********************	***********************	*****

□ 공사기한 연장 사유

○ 선행공종인 건축공사지연 (지열공사 및 경계부 흙막이 공법변경)에 따른

후속공종인 설비공사(전기,통신,기계,소방공사)가 적기에 진행될 수 있도록
건축공종의 기한연장(증55일)에 맞출 필요가 있음.

□ 계약금액 : 변경없음

□ 귀책소재 : 도시기반시설본부

□ 지체상금 부과여부 : 미부과

□ 건설사업관리단 검토의견

○ 선행공정인 건축공사의 연장(증55일)에 따라 후속공종인 설비공사(전기,통신,기계,소방공사)의 준공기한을 연장하는 것이 타당함.

Ⅳ		보고자 의견

□ 건설사업관리단의 준공기한 연기요청이 타당한 것으로 판단되어 총무부에

계약변경(공사기간 연장) 의뢰하고자 함.

붙 임: 건설사업관리단 관련 공문(합의서 포함) 각1부.  끝.