문서번호	급수운영과-25389
결재일자	2022. 6. 16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영팀장		북부수도사업소장
박상권	최용진	이문성		대결 06/16
				송종선
협 조
	주무관		구명임

교통소통대책 수립 용역  [준공기한 연기보고]

2022년

북부수도사업소

급수운영과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료, 빅데이터 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

『월계1-1중블록 공급체계 구축공사 교통소통용역 수립용역』

교통소통대책 수립용역[준공기한 연기보고]

우리사업소에서 시행중인【월계1-1중블록 공급체계 구축공사 교통소통용역 수립용역】에 대하여 심의일정 조정 및 자문회의 상정 등에 따라 준공기한을 연기하고자 보고 드림.

1	용 역 현 황

□ 용 역 명 : 월계1-1중블록 공급체계 구축공사 교통소통용역 수립용역

□ 용 역 비 : 29,125,200원(금이천구백일십이만오천이백원정)

□ 용역기간 : 2022. 3. 21. ~ 2022. 6. 18.(계약 3.17.)

□ 계약업체 : ㈜건현엔지니어링   대표 원동환

□ 검토근거 : 제2022-29호(2022. 6. 15.)

2	계 약 변 경

□ 변경내용 : 준공기한 연기

계약금액	당 초	29,125,200원(금이천구백일십이만오천이백원정)
	변경후	29,125,200원(금이천구백일십이만오천이백원정)
	증․감액	증·감액 없음
계약기간	당 초	’22. 3. 21. ~ ’22. 6. 18.
	변경후	’22. 3. 21. ~ ’22. 7. 20.(32일 연기)

3	연 기 사 유

□ 교통소통대책 심의 일정 조정 및 자문회의결과 반영 등으로 인한 절대 용역기간 부족

❍ 교통소통대책 교통소통대책 심의요청(2022년 5월 11일)

❍ 교통소통대책 사전 검토(2022년 5월 19일)

❍ 교통소통대책 자문위원회(비대면, 2021년 6월 7일 ~ 6월 10일)

❍ 교통소통대책 자문위원회 결과 통보(2022년 6월 13일)

□ 추진경위 및 향후일정

❍ 공사의 개요(착수~10일)

❍ 교통현황 및 분석(착수~20일)

❍ 교통시행으로 인한 교통영향분석(10일~20일)

❍ 공사시행으로 인한 문제점 및 개선방안(10일~40일)

❍ 홍보계획(30일~40일)

❍ 모니터링 시행계획(30일~40일)

❍ 보고서 제출(30일~70일)

❍ 자문위원회(70일~80일)

❍ 자문위원회 후 보고서 보완(90일~100일)

❍ 최종보고서 제출(110일~122일)

□ 연기일수 산출 : 총 32일

3	조 치 의 견

□ 용역시행 중 상기와 같은 사항으로 절대공기가 부족하여 준공기한 연기를 시행함이 타당한 것으로 판단되며,

□ 이와 같은 사항으로 행정지원과에 변경계약을 의뢰하고, ㈜건현엔지니어링에 통보하여 준공기한을 연기 하고자 함.

□ 준공기한 연기

○ 당초: 2022. 3. 21. ~ 2022. 6. 18.

○ 변경: 2022. 3. 21. ~ 2022. 7. 20.

○ 지체상금: 미부과

붙임  1. 준공기한 연장 요청 공문 및 합의서 각1부.

2. 교통소통대책 자문회의 결과 1부.  끝.