문서번호	설비부-24704
결재일자	2022. 6. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관		도로설비과장		설비부장
김세익		문학준		06/16
				김호성
협 조

『시립청소년 음악창작센터 건립 기계설비공사』

관급자재(공기순환기) 계약해지 및 재계약 검토보고

2022. 6.

도시기반시설본부

(설 비 부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

『시립청소년 음악창작센터 건립 기계설비공사』

관급자재(공기순환기) 계약해지 및 재계약 검토보고

우리 본부에서 추진하고 있는『시립청소년 음악창작센터 건립 기계설비공사』관급자재(공기순환기) 계약해지 및 재계약 요청에 대하여 검토 후 보고 드림

Ⅰ		사업개요

○ 공 사 명 : 시립청소년 음악창작센터 건립 기계설비공사

○ 위    치 : 서울특별시 양천구 신정동 1290-6 외 4필지

○ 규    모 : 지하1층/지상6층, 연면적 5,422.07㎡(청소년수련시설)

○ 건설사업관리단 : (주)종합건축사사무소근정, (주)세움이앤씨건축사사무소

Ⅱ		관련근거

○ 관급자재(공기순환기)구매 재계약 체결 요청[시립CM제2022-204호 ('22.06.16)]

○ 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제94조(공정관리)

Ⅲ		검토내용

○ 계약현황

계약번호	품명	계약자	계약금액(원)	납품기한
12-22-2-05051-00	공기순환기 (옵션)	(주)은성화학	46,268,480	2022.06.19.

○ 납품기한 연기사유

- 건축공사 준공기한 연장에 따른 관급자재(공기순환기) 납품기한 연장

계약번호	계약건명	계약자	차수	계약금액(원)	준공(납품)기한
					당초	변경(연장)
12-22-2-05051-00	공기순환기-옵션	(주)은성화학	총차	46,268,480	2022.06.19.	2022.10.14

※ 다수공급자 물품은 2개월이상 연기 불가하여 기존 계약 해지 후 재계약

○ 건설사업관리인 검토의견

- 건축공사 공사기한에 맞춰 납품기한 변경이 필요하나 다수공급자(MAS)조건에 의거 납품기한연장(2개월이상)이 불가하여, 기존 계약해지 후 재계약하여 납품기한을 연장하는 것이 적정하다고 판단됨.

Ⅳ		보고자의견

○ 건설사업관리단의 실정보고 내용이 적정하다고 판단되므로 계약부서(총무부)로 관급자재(공기순환기) 계약취소를 의뢰하고 추후 재구매 계약 체결을 의뢰하고자 함.

붙임  건설사업관리단 공문 1부.  끝.