“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	북부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	준공기한 연기의뢰 (월계1-1중블록 공급체계 구축공사 교통소통용역 수립용역)

우리사업소에서 시행중인 아래 용역에 대하여 준공기한을 연기의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 용 역 명 : 월계1-1중블록 공급체계 구축공사 교통소통대책 수립용역

2. 계 약 자 : (주)건현엔지니어링 대표 원동환

3. 계약금액 : 29,125,200원(금이천구백일십이만오천이백원정)

4. 공사기간

가. 당 초 : 2022.3.21. ~ 2022.6.18.

나. 변 경 : 2022.3.21. ~ 2022.7.20.

5. 연기사유 귀책사유 : 북부수도사업소

6. 지체상금 : 미부과

7. 연기사유 : 절대공기 부족

첨부 : 1) 준공기한 연기보고문 1부

2) 합의서 1부.  끝.

	급 수 운 영 과 장
주무관	박상권		급수관리팀장	代박상권		급수운영과장	대결 06/16
이문성
협조자
시행	급수운영과-25429	(	2022.06.16	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935, 4층 (번동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3343	/전송	02-3146-3389	/	psk300@seoul.go.kr	/	부분공개(5)