투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신	공원운영과장
(경유)
제목	문화비축기지 T5 전시장 시설개선 전기공사 설계변경 시행

1. 시설과-22178(2022.6.16.)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 시행중인『문화비축기지 T5 전시장 시설개선 전기공사』  설계변경을       아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명: 문화비축기지 T5 전시장 시설개선 전기공사

나. 공사기간: '22.5.30.~6.23.

다. 도 급 자: 주식회사 동현이엔지    *********

라. 설계변경내용: 붙임문서 참고

마. 설계변경내역                                              단위(원)

구 분		공 사 비		증,감	비고
		변경 전	변경 후
도급비	공 사 원 가	44,181,819원	48,545,455원	증)4,363,636
	부가가치세	4,418,181원	4,854,545원	증)436,364
	합 계	48,600,000원	53,400,000원	증)4,800,000

바. 예산과목: 서부공원녹지사업소 시설과, 세계적인 환경생태 테마공원 육성, 산하공원 운영,

문화비축기지 유지관리 및 운영, 시설비 및 부대비, 시설비

붙 임  1. 설계변경 보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 검증확인서 1부.

4. 합의서 1부.  끝.

	시 설 과 장
주무관	홍용현		기전시설팀장	윤상섭		시설과장	06/17
代고봉채
협조자	재무팀장	代민운기
시행	시설과-22212	(	2022.06.17	)	접수		(		)
우	03901	서울특별시 마포구 월드컵로 243-60	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	300-5560	/전송	300-5569	/	bluemoon5922@seoul.go.kr	/	부분공개(5)