문서번호	시설보수과-22352
결재일자	2022. 6. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설보수과장	동부도로사업소장
임승민	임영철	06/20
		代권순구
협 조

『영동3교 보수공사(장기계속)』

공사 실정보고서 검토 결과 보고

2022.  6.

동부도로사업소

(시설보수과)

『영동3교 보수공사(장기계속)』

공사 실정보고서 검토 결과

『영동3교 보수공사(장기계속)』와 관련, 서울시설공단으로부터 공사 실정보고(LMC 포장두께 및 수량변경 외 4건)가 제출되어 검토 결과를 보고 드림

1		공 사 현 황

□ 공 사 명 : 영동3교 보수공사(장기계속)

□ 공사기간 : 2021.12.20.~2022.10.31(1차:~2022.06.30)

□ 도 급 비 : 1,927,427,120원(총차)

※ 1차:947,100,000원, 2차:848,800,000원, 잔여:131,527,120원

□ 공사개요 : LMC포장 5,222㎡, 아스콘포장 3.5a, 표면보수 1,126㎡ 등

□ 도 급 자 : 위니드 건설(주) 대표 태동의

□ 감 독 청 : 서울시설공단

2		보 고 내 용

□ 공사 실정보고 제출(공사감독1처-2776,'22.06.15)

ㅇ 주 요 내 용                                        (단위:천원)

연번	보 고 내 용	개 략 공사비	비고
계		감)311,630
1	- LMC포장 두께 및 수량 변경(현장 실측결과 반영) • 포장두께 및 면적 ▷ 보도부 : 당초 T= 5㎝, A=1,526㎡ 변경 T=6.5㎝, A=1,457㎡ ▷ 차도부 : 당초 T= 10㎝, A=3,696㎡ 변경 T=9.2㎝, A=3,602㎡ • 바닥판 상면 보강공 ▷ 당초 49.9㎥ → 변경 25.7㎡	감)198,061

연번	보 고 내 용	개 략 공사비	비고
2	- 포장 시험파취조사 비용 반영 (시설보수과-20185,‘22. 03. 24) • 포장 소파 보수 ▷ 당초 - ㎡, 변경 134.2㎡	증)2,760
3	- 교통협의(수서경찰서) 결과 작업시간대 조정 등 • 교통체증으로 인한 주말 주·야간 시행 ▷ 당초 일 8시간 → 주말 24시간 • 싸인보드 실투입 장비 반영 ▷ 당초 덤프 2.5ton → 변경 주말 덤프 1ton • 보도부 아스팔트 철거 실 작업시간대 반영 ▷ 당초 주간 → 변경 야간	증)22,762
4	- 중앙분리대 규격 변경 • 기존 중앙분리대와 상이 ▷ 당초 0.35×0.3, L=125m 변경 0.45×0.25, L= 98m	감)9,184
5	- 공사용 자재 품질시험 비용 반영 • 초속경 LMC 부착강도 외 6종 16회	증)3,460
6	제 경 비	감)133,367

ㅇ 주요공종변경                                       (단위:천원)

연번	공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증 · 감	비고
1	워터젯 절삭	파쇄깊이 1cm이상	㎡	5,576	5,059	감) 989
	SS PCMC 생산(보도부)	t=5cm	㎡	1,526	-	감) 1,526
	SS PCMC 생산(보도부)	t=6.5cm	㎡	-	1,457	증) 1,457	신규
	SS PCMC 생산(차도부)	t=10cm	㎡	3,696	-	감) 3,696
	SS PCMC 생산(차도부)	t=9.2cm	㎡	-	3,602	증) 3,602	신규
	SS PCMC 생산		㎥	49.9	25.7	감) 24.2	바닥판 상면보강공

연번	공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증 · 감	비고
2	소파보수 (표층)	B-Type, 15㎡이하, WC-2	㎡	-	134.2	증) 134.2	신규
3	아스팔트절삭(보도부)	교량, 일시공량 20a이하	a	16.3	-	감) 16.3
	아스팔트절삭(보도부),야간	교량, 일시공량 20a이하	a	-	15.6	증) 15.6	신규
	작업보호차량	덤프트럭 2.5톤	일	10	-	감) 10
	싸인보드카	정차시, 주간,1ton	대	-	42	증) 42	신규
	싸인보드카	정차시, 야간,1ton	대	-	33	증) 33	신규
	교통통제원	주간	인	50	82	증) 32
	교통통제원	야간	인	-	66	증) 66	신규
	보행안전도우미	주간	인	50	16	감) 34
	보행안전도우미	야간	인	-	20	증) 20	신규
	에어탑 설치 및 철거공	주간	일	-	16	증) 16
	에어탑 설치 및 철거공	야간	일	-	11	증) 11	신규
	충격흡수시설	차량후단 장착용	조	2	-	감) 2
	기타안전시설	PE드럼 등	식	1	-	감) 1
4	중분대 설치 및 철거	0.35×0.3	m	125	-	감) 125
	중분대 설치 및 철거	0.45×0.25	m	-	98	증) 98	신규
5	품질시험비	부착강도 등 16종	식	-	1	증) 1	신규

3		검 토 내 용

□ 상기 LMC 포장두께 및 수량변경 외 4건에 대하여 검토한바, 서울시설공단 보고내용과 같이 시공 물량 실측 결과, 포장시험파취, 교통협의(수서경찰서) 협의결과 및 현장여건을 반영한 실 작업공종 등을 반영한 사항으로 적정한 것으로 판단됨

4		조 치 계 획

□ 상기 LMC 포장두께 및 수량변경 외 4건에 대한 실정 보고건에 대하여 설계변경시 반영

□ 금회 감액분(311,630)천원에 대하여는 본 공사 잔여분

(131,527천원) 및 현재 진행 중인 정밀안전진단 결과 물량 증가시 공사 반영하여 도로시설물 유지관리 업무에 만전을 기하고자 함

붙임  현장실정 검토보고(서울시설공단) 1부.  끝.