문서번호	급수운영과-24795
결재일자	2022. 6. 20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
이재헌	이승우	06/20
		최춘근

『포이초등학교 주변 외 8개소 장기사용 배급수관 정비공사-2구간』현장 실정 검토 보고(2차)

『포이초등학교 주변 외 8개소 장기사용 배급수관 정비공사-2구간』

현장 실정 검토 보고(2차)

2022. 6.

강남수도사업소

(급수운영과)

『포이초등학교 주변 외 8개소 장기사용 배급수관 정비공사-2구간』

현장 실정 검토 보고(2차)

우리 사업소에서 시행 중인 『포이초등학교 주변 외 8개소 장기사용 배급수관 정비공사-2구간』와 관련하여, 공사감독처로부터 현장 실정보고가 접수되어 아래와 같이 검토사항을 보고드림

※ 공사 실정 검토보고서 제출(포이초 배급수관 1차), [공사감독2처-5267(’22.6.16.)호]

☐ 공사개요

ㅇ 공 사 명: 포이초등학교 주변 외 8개소 장기사용 배급수관 정비공사

ㅇ 공사기간: ************************

ㅇ 공사개요: *******************

ㅇ 도 급 비: *****************************

ㅇ 도 급 사: ************

☐ 보고 및 검토내용

ㅇ 보고내용(서울시설공단): 중간밸브(S-gate) 설치 필요

- 현황 및 문제점

‣ 당초 2구간******************* 설계 시 종점부 정자분기 연결 작업(야간)으로 단수가 수반되어야 하나, 해당 구간 일대에 상가건물(음식점 등)이 대다수 분포되어 있어 단수공사 시 영업피해로 인한 시민 불편 사항 발생

**************************************************************

- 검토의견

‣ 작업 시 단수 범위가 넓고 음식점의 영업피해 등 시민불편 사항이 발생 할 것으로 판단되어, 단수구역 최소화를 위해 중간밸브******************* 설치 필요

*********************************

******************************************************************************************************

ㅇ 검토내용(사업소)

- 단수구역 검토

‣ 당초: 수전 **************************

‣ 변경: 수전 *************

- 중간밸브(S-gate) 설치 시 단수구역이 대폭 축소되어 야간 영업(음식점)에 차질이 생기지 않아, 단수로 인한 시민 불편 사항 또한 감소할 것으로 판단됨

※ 관급자재비:  ***************************

☐ 조치의견

ㅇ 상기와 같은 실정인 바, 서울시설공단에서 제출한 공사 실정 검토보고서와 같이 단수구역 최소화를 위해 중간밸브(S-gate)를 설치하는 것이 적합하다고 판단되며,

ㅇ 향후 설계 변경 시 증⋅감분에 대하여 적용토록 서울시설공단에 회신코자 함

붙임: 공사 실정 검토보고서 제출(1차) 1부.  끝.