문서번호	도시철도설비부-23051
결재일자	2022. 6. 20.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	정보통신과장	도시철도설비부장		도시철도국장
유홍근	김이곤	김중영		06/20
				하종현
협 조
	송변전과장		전계목
	신호과장		代전성완

진접선 차량기지 건설 시스템분야

실시설계용역 준공기한 연기 검토보고

2022. 6

도시기반시설본부

[도시철도설비부]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료, 빅데이터 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

- 진접선 차량기지 건설 시스템분야 -

실시설계용역 준공기한 연기 검토보고

「진접선(4호선연장) 차량기지 시스템분야(전력,통신,신호) 실시설계」의 궤도용역 성과물 반영 등으로 완성도 높은 용역성과물 도출을 위하여 준공  기한을 연기하고자 검토 보고함

Ⅰ		용역개요

❍ 용 역 명 : 진접선(4호선 연장) 차량기지 건설공사 전력,통신,신호분야 실시설계용역

❍ 과업내용 : 진접선 차량기지 및 인입선 전력, 통신, 신호 실시설계

- 과업규모 : 차량기지신설 197,400㎡, 인입선 4.9km

❍ 용역계약

분 야		전 력 (송변전/전차선)	통 신	신 호
계약자		세종기술(주)	㈜안세기술	㈜경인기술
계약 기간	총차	*********************	*********************	*********************
	1차	*********************	*********************	*********************
	2차	*********************	*********************	*********************
계약 금액 (백만원)	총차	***	***	***
	1차	***	***	***
	2차	***	***	***

❍ 용역 추진현황

- '18.07.  : 기본설계 용역준공

- '20.02.  : 실시설계 용역발주

- '20.04.  : 실시설계 용역계약 및 착수(1차)

- '20.12.  : 1차용역 준공

- '21.01.  : 2차용역 착수

- '21.01.~'21.12. : 용역일시 정지

▸선행공정인 궤도용역 발주 지연으로 시스템분야 설계반영을 위한 설계중지

- '22.01. : 실시설계 개시

Ⅱ		준공기한 연기 검토

준공기한 연기 사유

❍ 선행공정인 궤도분야 실시설계용역이 ‘22년 9월 준공 예정으로 시스템분야 내실 있는 실시설계 성과물 도출을 위해 궤도분야 성과물을 반영한 설계보완 추가기간 필요

- ****************************************************************************

*******************************************************************************************

**************************************************************************************

❍ 진접차량기지 관련 전력공급방안 미확정

- ****************************************************************************************************

❍ (신설) 창동변전소 위치 변경 추진 중

- ***********************************************************************************

***************************************************************************

Ⅲ		조치계획

❍ 궤도분야 실시설계용역 등 선행공정이 완료되어 설계에 반영 가능시점까지 시스템분야(전력, 통신, 신호)설계용역 준공기한 연기

❍ 용역계약 변경사항(전력, 통신, 신호)

구 분		용역기간		비 고
		당 초	변 경
용역 기간	총차	**********************	*********************
	2차	************************	**********************
용역금액		증·감액 없음

※ 신호분야 : *****************************************************************************

❍ 귀책소재   : 서울시 도시기반시설본부

❍ 지연배상금 : 미부과

Ⅳ		행정사항

❍ 계약기간 변경의뢰        :     총무부

- 용역 준공기한 연기 통보 :    계약업체.