문서번호	도시철도설비부-23054
결재일자	2022. 6. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		신호과장	도시철도설비부장
전성완		代전성완	전결 06/21
			김중영
협조

별내선(8호선연장) 신호보안설비공사(1공구)(총차, 1차)

준 공 기 한   연 기   검 토   보 고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 6.

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

별내선(8호선연장) 신호보안설비공사(1공구)(총차, 1차)

준 공 기 한   연 기   검 토   보 고

별내선(8호선연장) 신호보안설비공사(1공구)(총차, 1차)의 선행공정 지연으로 감리단으로부터 준공기한 연기 요청이 있어 공사의 원활한 추진과 공정관리를 위하여 준공기한을 연기하고자 검토 결과를 보고드림

Ⅰ		관 련 근 거

ㅇ 별내선(8호선 연장) 신호보안설비공사(1공구) 1차 준공기한 연기      요청에 대한 검토 보고(별내선 시감 제22-499호, '22.06.20.)

Ⅱ		공 사 개 요

ㅇ 공 사 명: 별내선(8호선연장) 신호보안설비공사(1공구)

ㅇ 공사구간: 암사~BN1제어범위(2km800), 암사역, 모란차량기지

ㅇ 공사기간: 2021.7.1 ~ 2023.9.28(총차)

2021.7.1 ~ 2022.6.30(1차)

ㅇ 공사내용

- 신호보안설비공사(본선 2.8km, 차량기지 1.4km)

- 유치선 7선 증설 및 시험선 신호보안설비 개량

- 신호기 72기, 선로전환기 38대 설치 등

ㅇ 계약금액 : 5,053,088천원 (1차 1,949,092천원)

ㅇ 계 약 자 : 종합전기(주) 대표 김유훈

ㅇ 감 리 단 : (주)에이알텍 대표 이상남

Ⅲ		그간 추진현황

ㅇ ’21.2.26 : 공사 발주계획 수립

ㅇ ‘21.3.24 : 공사 발주

ㅇ ’21.6.15 : 계약 체결

ㅇ ’21.7. 1 : 신호보안설비공사(1공구) 공사 착공

Ⅳ		검 토 내 용

ㅇ 준공기한 연기 사유 : 선행공정 지연에 따른 절대공기 부족

- 모란차량기지 유치선 궤도작업이 '22.5.31. 완료됨

- BN1구간(본선) 궤도분야 현재 터널 내 침목배열 및 궤광조립 중으로       선로변 신호공사(신호기, 궤도회로, 선로전환기 등) 시행 불가

ㅇ 공사기간 변경 현황

구 분		변 경 전	변 경 후	비 고
공사기간	총 차	2021.7.1. ~ 2023.9.28.	2021.7.1. ~ 2023.9.28.	변동없음
	1 차	2021.7.1. ~ 2022.6.30.	2021.7.1. ~ 2022.11.30.	153일 연장

ㅇ 공사비 변경 현황 : 공사비 변경 없음

ㅇ 준공기한 연기 귀책소재 : 도시기반시설본부

ㅇ 지체상금 부과여부 : 미부과

ㅇ 감리단 검토 의견

- "별내선(8호선 연장) 신호보안설비공사(1공구)" 중 1차공사는 궤도 등       선행공정 지연으로 준공기한을 연기하여 추진함이 타당함

Ⅴ		조 치 의 견

ㅇ 감리단의 준공기한 연기 요청사항을 검토한 결과 선행공정 지연에      따른 신호공사 연기 검토내용이 적정한 것으로 판단되어 총무부에      변경계약을 의뢰코자 함

붙임  감리단 준공기한 연기 요청 검토 보고서 1부.  끝.