문서번호	기반시설과-21441
결재일자	2022. 6. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		기반시설과장
임영준		06/21
		이병철
협 조

난지물놀이장분수 개선공사 설계변경 및 정산보고

난지물놀이장분수 개선공사

설계변경 및 정산보고

2022.  6.

시 설 부

(기반시설과)

난지물놀이장분수 개선공사

설계변경 및 정산보고

난지물놀이장분수 개선공사와 관련하여 제경비 지출내역에 변동이 발생하여 아래와 같이 설계변경 및 정산 시행하고자 함

□ 공사개요

ㅇ 공사명 : 난지물놀이장분수 개선공사

ㅇ 업  체 : 한샘워터테크 대표 ***

ㅇ 규  모 : 소나기분수 및 스윙분수 노즐 4개 신설

ㅇ 공사비 : 금**********원

□ 계약변경 내용 및 사유

ㅇ 변경내용

- 계약금액 변경(감 2,987,000원)

· 당초 : *****************************

- 계약기간 : 변경사항 없음

ㅇ 변경사항

구분	당초	변경	증감	비고
재료비	**********	**********	-
노무비	*********	*********	-
경비	*********	*********	감)2,228,829	퇴직공제부금,산업안전보건관리비,환경보전비 미지급분 감액
순공사비	**********	**********	감)2,228,829
일반관리비	*********	*********	감) 133,729
이윤	*********	*********	감) 352,896
공사원가	**********	**********	감)2,715,455
부가가치세	*********	*********	감) 271,545
합계	**********	**********	감)2,987,000

□ 조치계획

ㅇ 설계변경사항에 대하여 정산시행

붙임  1. 정산내역서 및 합의각서 1부. 끝.