문서번호	조경과-23642
결재일자	2022. 6. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	조경시설팀장	조경과장
김도연	이현삼	06/21
		안수연

2022년 생활주변 자투리땅 녹화사업 대상지 변경 검토 보고

2022년 생활주변 자투리땅 녹화사업

대상지 변경 검토 보고

2022.  6.

푸 른 도 시 국

(조경과)

2022년 생활주변 자투리땅 녹화사업

대상지 변경 검토 보고

생활주변 자투리땅 녹화사업 추진과 관련, 대상지 변경 요청이 있어 아래와 같이 검토하고 보고드림.

□ 사업개요

ㅇ 위    치 : 성북구 돌곶이역 1번 출구(45㎡)

ㅇ 사업기간 : ‘22. 1.~ 10.

ㅇ 사 업 비 : *****

ㅇ 사업내용 : 초화류 및 수목 식재, 쉼터 조성 등

□ 추진경위

ㅇ ‘22. 1. 24. : 사업계획 수립 및 시달

ㅇ ‘22. 6. 17. : 대상지 변경 신청[성북구→시(조경과)]

□ 변경개요

ㅇ 변경사유 :****************************

ㅇ 변경내용

구 분	당 초	변 경
대 상 지	돌곶이역 1번 출구 (성북구 석관동 349-8)	석계역 일대 (성북구 석관동 375-29)
소 유	시유지	시유지
규 모	45㎡	50㎡
사 업 비	*****	*****

ㅇ 위치도 및 현황사진

위치도(성북구 석관동 375-29)	대상지 현황

□ 검토의견

ㅇ ******************************************************************************************

ㅇ **************************************************************************************

□ 향후계획

ㅇ ’22. 6.      : 대상지 변경 승인통보 [시(조경과)→성북구]

ㅇ ’22. 7.~ 8. : 실시설계용역, 설계심의

ㅇ ’22. 9.~ 10.: 공사 시행

붙임 : 대상지 변경 신청 공문 1부.  끝.