문서번호	기전과-23347
결재일자	2022. 6. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
주현탁		06/21
		최경주
협 조

(수정)「증산지하차도 진입차단시설 설치공사 실정보고서」

검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 6.

서부도로사업소

(기  전  과)

「증산지하차도 진입차단시설 설치공사 실정보고서」

검토보고

「증산지하차도 진입차단시설 설치공사」시행 중 시공업체인 리빙아트(주) 로부터 공사 실정보고 승인요청 건이 접수되어 검토보고 드림.

Ⅰ		추진근거

❍ (수정)실정보고서 접수 -「증산지하차도 진입차단시설 설치공사」

(기전과-23324, '2022. 6. 20.)

Ⅱ		공사개요

❍ 공 사 명 : 증산지하차도 진입차단시설 설치공사

❍ 공사위치 : 증산지하차도(은평구 증산동 ~ 마포구 상암동)

***********************************************

❍ 계약방법 : 일반경쟁입찰

************************

❍ 계 약 일 : 2022. 4. 21.

❍ 착 공 일 : 2022. 4. 22.

❍ 공사기간 : 착공일로부터 2022. 8. 31.

❍ 공사규모 : 설치공사 1식

- 기초 터파기, 교통 통제 실시

- 상암동 방면 문주형 , 증산동 방면 편주형 진입차단시설 설치

- 진입차단시설 제어 및 사업소 내 통합관리소 연동

주요 변경내용			수량(kg)	비고
1. 문형식 구조물 물량 변경
문형식 구조물 가로 길이 변경	상단 가로 길이 감소	KSD3566 ⦽165.2×4.5T	1027.008	당초
		KSD3566 ⦽165.2×4.5T	884.37	감소
문형식 구조물 세로 길이 변경	주기둥 세로 길이 증가	KSD3566 ⦽267.4×6T	1237.12	당초
		KSD3566 ⦽267.4×6T	1314.44	증가
2. 차선규제봉 추가
문주형 기초 주변 차선규제봉 신설	왼쪽 기초	⦽80×200×750H	6EA	신규
	오른쪽 기초	⦽80×200×750H	6EA	신규
3. 편주식 구조물 물량 변경
편주식 구조물 상단 대각 길이 변경	상단 대각 미사용	⦽76.3×3.2T	51.86	감소
4. 보험료 정산		금액(원)		비고
건강보험료	미 사용분 정산	2,442,564		감소
연금보험료		3,144,933
노인장기요양보험료		299,702
퇴직공제부금비		1,607,410

Ⅲ		현장실정사항

실정보고 내용

공사비(예상) 변경액

(단위 : 원)

구 분		변 경 전	변 경 후	증·감
총 공 사 비		265,273,600	250,123,000	(감) 15,150,600
도급비	공급가액	237,299,435	227,384,546	(감) 9,914,889
	부가가치세	23,729,943	22,738,454	(감) 991,489
고용개선지원비		4,244,222	-	(감) 4,244,222
계		265,273,600	250,123,000	(감) 15,150,600

Ⅳ		검토의견

기존 교통표지판 시야 확보 어려움 (현행 설치예정 사진)	좌회전 차선(차량 혼잡)

❍ 상암동 방면에 문주형 진입차단시설을 기존 높이대로 설치하게 되면, 이미 설치된 교통표지판을 가릴 우려가 있어 금번 설치공사에 문주형

진입차단시설의 높이를 증가시키는 물량 변경이 타당하다고 판단되며,

❍ 좌회전 차선에서 진입차단시설 기초 설치 부분을 명확하게 구획하여

좌회전하는 차량과의 충돌을 최소화 할 수 있어 신설이 타당하다고 판단됨.

❍ 상기 실정보고 사항에 따라 승인 회신한 후, 변경계약을 추진하고자 함.

붙임  1. 실정보고서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.  끝.