문서번호	전시과-21805
결재일자	2022. 6. 21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	전시과장	서울시립과학관장
이진원	이현배	06/21
		이정규

-「기후위기 특별전」제작·설치 및 운영 용역 -

설계보고회 개최 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 06.

서울시립과학관

(전   시   과)

-「기후위기 특별전」제작·설치 및 운영 용역 -

설계보고회 개최 결과보고

'서울시립과학관 2022년 기획전「기후위기 특별전」제작·설치 및 운영 용역'사업의 전시설계에 대한 최종보고회 개최결과를 보고드림

□ 추 진 근 거

○ 서울시립과학관 2022년 기획전 「기후위기 특별전」개최 추진계획(전시과-1163, 2022. 3. 3.)

○ 용역계약 체결 통보(서울시립과학관 2022년 기획전 기후위기 특별전 제작 설치 및 운영 용역)(전시과-20977, 2022. 5. 3.)

□ 사 업 개 요

○ 계 약 명 : 서울시립과학관 2022년 기획전 기후위기 특별전 제작 설치 및 운영 용역

○ 계약금액 : 일금180,000,000원(일금일억팔천만원)

○ 계약일자 : 2022. 4. 28.(완수일자 : 2022. 11. 25.)

○ 계약업체 : 주식회사 전시문화피움

□ 설계보고회 개최개요

○ 일    시 : 2022. 6. 16.(목) 15:00~17:00

○ 장    소 : 서울시립과학관 회의실

○ 참 석 자 : 총 6명

- 과 학 관 : 전시과장, 이진원, 신지혜 주무관

- 계약업체 : **********************

○ 주요 보고내용

- 과업 착수 후 총 4차례에 걸친 협의를 통해 도출한 전시 설계안 보고

• 전체적인 전시구성 및 전시실 내 평면·입면 배치 계획

• 개별 전시물에 대한 세부 연출계획 및 체험방법

※ 일부전시물의 경우, 연출 및 체험방법 조정(최종 확인 후 설계도서 납품)

- 전시물 설치·운영을 위한 기반시설(전기·통신·건축·설비 시설) 사용 협의

- 설계완료 및 전시 제작·설치 일정 등 과업추진 일정 보고 및 협의

□ 보고회 주요내용

○ 주요 전시구성 및 내용

존	코 너	아 이 템	전 시 개 요	연 출 매 체
도 입	얼마남지 않은시간	부디 1.5℃가 오르기 전에	탄소시계, 하키스틱그래프, 탄소배출 원인 일상물품 전시연출	그래픽패널, 오브제, 디지털시계
		숫자로 보는 기후	탄소시계(7년)의 의미와 잔여탄소 배출총량, 탄소중립 등에 관해 소개	그래픽패널
		기후가 왜요?	기후위기에 관한 다양한 질문들과 과학적 해답들을 문장으로 나열	벨트
기후위기가 뭐예요?	기후상식 자가테스트	기초테스트	기후 관련 간단한 자가질의응답 체험	반자동 채점판
		심화테스트	자가질의응답 심화 체험	반자동 채점판
	탄소추리게임	당신의 선택은?	물건의 탄생에서 소멸까지의 과정을 유추하여 탄소발자국 이해	핸즈온 패널
지구가 어떤데요?	지구의 시그널	기후위기와 한파	대기에서의 기후 변화 양상 중 북극진동을 예시로 체험	작동체험물
		영구동토층이 녹으면	영구동토층의 해빙으로 인한 연쇄 현상을 체험전시물로 구현	도미노체험물
		열과 탄소를 품은 바다	바다 수심별 온도상승과 탄소유입으로 발생되는 현상을 수심별로 설명	입체 그래픽 패널
		스스로 뜨거워지는 지구	세계 지도에서 티핑포인트를 설명하여 지구 스스로 뜨거워질 수 있음을 전달	핸즈온 패널
	불편한 진실	지구, 지금	지구의 기후변화가 나의 일상에 큰 영향을 줄 수 있다는 경각심을 일깨우는 영상	멀티비전 영상
	기후비상	지글지글 붉은 지구	인트로에서 소개되었던 오브제들이 기후위기에 미치는 영향을 간접 체험 해보는 인터랙션 전시물	오브제, 인터렉티브 체험물
우리가 어떻게 되는데요?	변화될 일상	기후, 일상을 바꾸다	기후로 인해 변화될 일상을 만화, 플립북으로 체험해보기	라이팅패널, 플립북
	지구를 위하여	숨은 반전 찾기	그린워싱과 친환경제품 찾아보기	편광판, 그래픽패널
		지구를 위한 아이디어	기후위기 해결을 위한 지구공학적인 방법과 일상의 방법 탐구	전시부스, 그래픽패널
	다가올 미래	반찬 마감세일	반찬 블록을 통해 식료품과 기후변화의 관계 파악	바코드스캐너, 모니터, 패널
		육지가 바다라면	기온상승에 따른 해수면 변화를 상징하는 거울 포토존	거울, 그래픽패널
	기후행동	탄소저감실천 영수증	기후위기 대응 실천목록을 선택하면 저감되는 총 탄소배출량이 나타나고, 이 내용이 영수증으로 출력	키오스크, 출력기, 프로젝터, 스크린
		거듭제곱으로 약속	2명을 설득하여 탄소제로에 참여할 시 나타나는 기대효과를 거듭제곱표로 연출	그래픽 포토존
		실천 관련 영상	기후위기과 관련한 실천영상 상영	DID
어떻게 해야하나요?	메시지 터널	메시지 터널	기후위기와 관련한 메시지 행잉터널	현수막

○ 설계보고안에 대한 주요 조정요청 내용

- 전시벽 중 빈 공간에는 '안전'이 연상되는 패턴(디자인) 추가

- 영상물의 경우, 청각장애인을 위해 소리정보는 자막처리

- [1-1] '부디 1.5℃가 오르기 전에' : 포토존을 적극 활용 할 수 있도록 기존 바닥재를 덮는 시공이 필요하며, 사진찍기용 피켓설치

- [3-6] '지글지글 붉은 지구' : 온난화 지연 오브제는 사용효과를 객관적인 수치로 제시 할 수 있는 텀블러, 에코백으로 변경

- [4-1] '기후, 일상을 바꾸다' : 플립북의 내용은 코너배경의 만화 라이팅패널의 주제와 동일한 이야기로 구성

- [4-8] 사용하고자 하는 영상의 협조가 불가능하여 대체 영상 필요함

○ 과업추진 일정 협의

- 설계 조정 요청에 대한 보완 후 '22.6.24.(금)까지 설계도서 납품(설계확정)

- 기 확정된 사항들에 대해 자재조달, '22.6.27.(월)부터 제작·설치 착수

- '22.7.22.(금) 현장 설치 완료 및 개막식 전까지 잔손보기

○ 기타 사항

- 전시홍보물 제작 관련 : 포스터, 현수막, 가로등 배너, 리플릿 제작

- 전시자재는 방염처리 필요하고, 가벽 설치 시 유도등 보완설치

□ 향 후 계 획

○ 설계도서 납품             : 2022. 6. 24.限

○ 현장설치 착수             : 2022. 6. 27.

○ 현장설치 완료 및 시운전   : 2022. 7. 22.

○ 개막식 및 전시운영        : 2022. 7. 26.

○ 전시운영 종료             : 2022. 10. 30.

○ 전시시설 철거 및 결과보고 : 2022. 10. 31. ~ 11. 25.

○ 준공검사 및 대금지급      : 2022. 12. 2.(예정)

붙임 1. 회의록(설계보고회) 1부.

2. 설계보고 자료 1부.  끝.