부 장		06/21		과 장	김상용	심사자	조규영	설계자	권용빈		설 계	심 사			결 재
		이철									2022년 6월 일	2022년 6월 일
변 경 설 계 서(6차 2회)
	용역명 서울시 신림선 도시철도 민간투자사업 건설사업관리용역 4공구(6차 2회)
	구 분					당 초				변 경			증, 감
	총 용 역 비					632,100,000				676,560,000			증)	44,460,000
	도급비		공 급 가 액			515,300,000				515,300,000			-	0
			물 가 변 동			42,200,000				82,100,000			증)	39,900,000
			소 계			557,500,000				597,400,000			증)	39,900,000
			부 가 가 치 세			55,750,000				59,740,000			증)	3,990,000
			손해배상공제료			18,850,000				19,420,000			증)	570,000
			계			632,100,000				676,560,000			증)	44,460,000
< 용역개요 > ○ 공사개요 : 총연장 2,689m(환기구1, 정거장 3개소, 터널 및 개착 등) ○ 감리기간 : '21. 5. 8. ~ '22. 6. 28. ○ 변경내용 : 소비자물가지수 변동에 따른 계약금액 변경

.