문서번호	시설관리과-25183
결재일자	2022. 6. 22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
박홍		김진성	06/22
			代김진성
협조

설계변경(3차-최종) 심의결과 보고 (2021년 서초,강남구 관내 긴급누수복구공사)

2022년 6월

강남수도사업소

시설관리과

설계변경 심의결과 보고(3차-최종)

심의 의원회 의견

○  공 사 명: ***********************************

○ 심의일시: 2022. 6. 22.(수) 10:00~11:00

○ 심의장소: 강남수도사업소 4층(시설관리과)

○ 심의의견: 설계변경(3차,최종) 심의 의견을 아래와 같이 제시함.

구 분	직 위	심의내용 및 결과		성 명	비고
		심의항목	심의결과
위원장	시설관리과장	물량변동 적정성	물량증․감 적정반영	* ***
		신규공정 단가산정	낙착율적용 적정산정
		제경비 적정산정	적정요율 반영
위 원	급수운영과 시설6급	물량변동 적정성	현장여건 변경 적정	***
		신규공정 단가산정	낙착율적용 적정산정
		제경비 적정산정	적정요율 반영
위 원	급수운영과 시설6급	물량변동 적정성	물량증․감 적정반영	***
		신규공정 단가산정	적정 산정
		제경비 적정산정	관련규정 요율 적정반영
위 원	시설관리과 시설6급	물량변동 적정성	물량증․감 적정반영	***
		신규공정 단가산정	낙착율적용 적정산정
		제경비 적정산정	적정하게 반영함
위 원	시설관리과 시설6급	물량변동 적정성	물량 증,감 수량 적정	***
		신규공정 단가산정	낙착율적용 적정산정
		제경비 적정산정	요율 적정 반영됨

신청부서명	시설관리과
작 성 자	***
제출년월일	2022.6.22.

설계변경 사유서(3차,최종)

□  공사 현황

□ 공 사 명: *****************************************

□ 공사개요

- 누수복구:************************

- 불용관 및 인입관정비: *******************

□ 공사기간: ************************

□ 도 급 비: ***************

□ 도 급 자: ****************

□  설계변경 사유

❍ 시공물량 증․감에 따른 계약물량 조정

물량 증․감	공 종
물량 증가	******************************
물량 감소	******************************

- 시공물량 공종별 증․감 현황

공종별	물량 증감	공 종
토 공	증가	******************************
	감소	*****************************
부설공	증가	**********************************
	감소	*****************************
구조물공	증가	************************************
	감소	***********************************
부대공	증가	**************************************
	감소	********************************
사급자재	증가	*****************************
	감소	*****************************
포장공	증가	************************
	감소	*******************************************

❍ 신규 공종 발생

공 종	내 용
******************************	**************

❍ 사급자재 물량 변경

공 종	내 용
******************************

□  설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분	당초금액	변경금액	증․ 감
도 급 비	*************	*************	**********
공급가액	*************	*************	**********
부가가치세	***********	***********	*********

□  조치계획

❍ 상기와 같이 설계변경(3차,최종)심의 시 설계사유(물량증․감 및   신규공종 등)에 대해 검토한 결과 산출 및 낙찰율 등을 적정하게 적용하여 심의 결과에 의거 설계변경 시행 및 변경계약 의뢰하고자 함.

붙임: 1. 설계변경 내역서 1부

2. 설계변경 심의의견서 1부.  끝.