투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	별내선 건설사업관리단
(경유)
제목	업무지시(경기도 요청사항 반영에 따른 설계변경)

1. 별내선 복선전철 건설사업 관련 종합사령실 개량 협조 요청(철도건설과-4959, '22.5.4.)과 관련입니다.

2. 별내선 복선전철 건설사업 업무협약에 따라 경기도 요청사항을 수용하여 아래와 같은 사항을 설계변경하고 추후 정산코자 하오니, 관련 내용을 검토하여 실정보고서를 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 별내선(8호선연장) 기계공사 자동제어

- (경기도구간) 개도율 확인가능 댐퍼구동기 및 EOCR(전자식과전류계전기) 추가 설치에 따른 종합사령실 개량(관제점 신설) 및 시운전

나. 승강장안전문 제작구매설치

- (경기도구간) 승강장안전문 도어 유닛마다 관제가 가능토록 한강진PSD관제센터  PSD중앙관제시스템 개량(프로그램 추가 설치)

붙임: 별내선 복선전철 건설사업 관련 종합사령실 개량 협조 요청 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김태영		설비공사과장	이광주		도시철도설비부장	06/22
김중영
협조자
시행	도시철도설비부-23109	(	2022.06.22	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 8층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-772-7315	/전송	02-772-7308	/	이메일	/	부분공개(5)