문서번호	시설관리과-26311
결재일자	2022. 6. 22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
박주영	이승영	06/22
		조임남
협 조

상수도관 이설 공사 착공계 제출에 따른 검토보고

(선유로13길 #일대 하수관로 개량공사 중 상수도 이설공사)

2022. 6.

남부수도사업소

(시설관리과)

상수도관 이설 공사 착공계 제출에 따른 검토보고

(*********일대 하수관로 개량공사 중 상수도 이설공사)

*****************************************************************************

□ 현   황

○  관련근거: 영등포구청 치수과-9553(2022. 5. 25.)호 "상수도 이설 협조 요청"

시설관리과-26274(2022. 6. 22.)호 "상수도 이설 착공계(선유로)"

○  사 업 명: *********일대 하수관로 개량공사 중 상수도 이설공사

○  공사위치: ***********************

○  공사기간: 2022년 6월 16일 ~ 7월 29일

○  발 주 처: *****

○  시 공 사: *******

○ 공사개요: D=150㎜, L=10m

- *********일대 하수관로 개량공사 관련 상수도관(D150) 저촉으로

인한 이설공사

□ 보고내용

○  영등포구청 치수과에서 시행하는 상기 공사와 관련, 상수도관이 하수관로 일부를 관통한 상황으로 원인자 이설 건임

○  위치도 및 현장사진

□ 이설공사 시공계획

○ 단수계획

- 단수없이 라인스토핑 시행

○ 공사관계자 비상연락처

구분	성명	연락처	비고
발 주 처	***	************	*****
시 공 사	***	*************	*******
건설사업관리기술자	***	*************	********

□ 사급자재 사용계획

○ 사급자재 사용목록(붙임내역 참조)

- KC, KS인증 검토결과 이상없음

※ 건설사업관리기술자가 해당 사급자재 확인 후 공사현장 반입

○ 인증방법

- KS인증 확인방법 : KS인증지원시스템 검색

- KC인증 확인방법 : KC위생안전기준인증등록정보망 검색

- 단체표준 및 KS제품 인증 : 해당 제품 인증기관에서 기술인증 검색

□ 원인자부담금 부과

○  원인자부담금 산출내역                              단위(원)

공 종	규격	수량	단위	단가	금액	비 고
*****					*******
***	******	**	*	******	*******	************************** ****************
*					*******

○  퇴수량 산출근거(부과량: ㎥)

연번	위 치	세척구경 (㎜)	수 압 (kg/㎠)	세척 수량	퇴수 구경 (㎜)	관내퇴수 (관연장) (단위:M,㎥)		부과량 (㎥)	세척 시간 (분)
*	**********	**	***	**	***	**	***	**	**

○  상기 산출 근거에 따라 우리사업소 요금과에 원인자부담금 고지서 발급 요청

□ 검토의견

○ 건설사업관리기술자(***)가 승인된 사급자재 사용 및 공사계획에 따른 홍보 등 차질 없이 진행할 수 있도록 관리·감독

- 이설계획 변경으로 단수범위 및 단수일정 변경 시 단수계획서 수정 제출하여 사업소 승인 후 시행

○ 계획된 시간 내에 배수관 연결작업이 완료될 수 있도록 작업계획 수립, 자재준비, 인력 및 장비 등 사전확보 철저

○ 상수도관 부설 공사에 따른 원인자부담금(퇴수비, 출동경비) 부과

□ 조치의견

○ 상기와 같이 발생되는 원인자부담금을 부과 및 본 계획을 영등포구청에 통보하여 구역 내 상수도관 원인자 이설공사 공사계획 및 안전관리에 지장이 없도록 조치하고자 함

붙임  1. 상수도관 이설 승인조건 1부.

2. 착공계 1부.

3. 원인자부담금 산출내역서 1부.  끝.