문서번호	치수과-10105
결재일자	2022.6.22.
공개여부	부분공개
방침번호

주무관		하수계획팀장		치수과장		안전건설교통국장
정서영		김경원		민병기		06/22 代어용경
협조
	재무과장		송경택
	계약팀장		홍혜영

★ ◉

「2022년 하수사업 건설폐기물 처리용역」

설계변경(제1회) 시행 검토 보고

2022. 06.

성   동   구

(치 수 과)

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 ☑ 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 □ 공약(약속)사업 □ 계속사업 □ 인센티브/공모사업 □
소통분야 고려사항		●	구민		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	전문가		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	이해당사자		:		유 □ ( ) 무 ☑
여성친화 도시		성 평 등 □ 안 전·편 의 □ 가 족 · 공 동 체 회 복 □ 여 성 참 여 □
기타 고려사항		일 자 리 □ 환경영향 □ 안 전 ☑ 유지비용 ☑ 바른 공공언어 □
		성 인 지 □ 취약계층 □ 장 애 인 □ 디 자 인 □ 갈등발생 요인 □
타자원 활용		●	중앙부처	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	서울시	:		유 ☑ ( 시비 재배정사업 ) 무 □
		●	기업	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	민간단체	:		유 □ ( ) 무 ☑
언론홍보 계획		기획보도 □ 보도자료 □ SDTV □ 성동뉴스레터 □ 성동구소식지 □
		기 고 문 □ 전자행정서비스 □ S N S □ 기타 (리플릿 등) □ 없 음 ☑
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

「2022년 하수사업 건설폐기물 처리용역」

설계변경(제1회) 검토 보고

우리구에서 시행중인 『2022년 하수사업 건설폐기물 처리용역』의 건설폐기물 처리물량 증·감 등에 대하여 아래와 같이 설계변경 시행코자 함.

Ⅰ		용역개요

□ 용 역 명: 2022년 하수사업 건설폐기물 처리용역

□ 사업기간: 2022. 3. 31. ~ 2022. 12. 31.

□ 규    모: 건설폐기물 운반 960㎥, 건설폐기물 처리 2,224톤

□ 사 업 자: ㈜상익공영 (대표 노승희)

□ 용 역 비: 77,301,000원

Ⅱ		설계변경 사유

□ 현장별 본공사 설계변경에 따른 처리물량 증감

○ 건설폐기물 운반: 변경 전(960㎥) → 변경 후(1,202㎥) [증 242㎥]

○ 건설폐기물 처리: 변경 전(2,224톤) → 변경 후(2,753톤) [증 529톤]

□ 물량 증․감 내역

연번	공 사 명	운반(㎥)			처리(톤)			비고
		당초	변경	증․감	당초	변경	증․감
1	2022년 관내 하수시설물 유지보수공사(단가계약)	500	530	증) 30	1,156	1,204	증) 48
2	무학봉12길3-9주변 외 3개소 하수관로 개량공사	404	616	증) 212	939	1,420	증) 481
3	자동차시장길3 주변 외 2개소 사각형거 보수공사	56	56	-	129	129	-
합 계		960	1,202	증)365	2,224	2,753	증) 529

□ 공사별 용역비 산출내역

연번	공 사 명	용 역 비(원)	예 산 과 목	비고
합 계		96,850,000	3개 사업
1	2022년 관내 하수시설물 유지보수공사(단가계약)	42,942,000	치수과, 하수·치수관리, 하수관리, 관내 하수시설물 유지보수공사, 시설비	구비
2	무학봉12길3-9주변 외 3개소 하수관로 개량공사	49,455,000	물재생계획과, 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비, 시설비	하수도사업 특별회계
3	자동차시장길3 주변 외 2개소 사각형거 보수공사	4,453,000	물재생계획과, 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비, 시설비	하수도사업 특별회계

Ⅲ		설계변경 내역

□ 용역금액 변경

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감
총용역비		77,301,000	96,850,000	증 19,549,000
도급비	공급가액	70,273,637	88,045,455	증 17,771,818
	부가세	7,027,363	8,804,545	증 1,777,182
	계	77,301,000	96,850,000	증 19,549,000

Ⅳ		조치의견

□ 상기 내용과 같이 물량 증·감 등에 대하여 설계변경 시행하고자 함.

붙임 1. 변경설계서 1부. 끝.