문서번호	도로보수과-23094
결재일자	2022. 6. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	북부도로사업소장
황태선		김순수	06/23
			고영준
협 조

『2022년 도로 및 교통부속물 유지보수공사』

실정보고(제1회)에 따른 검토보고

2022. 6.

북부도로사업소

(도로보수과)

『2022년 도로 및 교통부속물 유지보수공사』

실정보고(제1회)에 따른 검토보고

우리사업소에서 시행중인『2022년 도로 및 교통부속물 유지보수공사(연간단가)』와 관련하여 도로옹벽 점검 결과에 따른 보수 및 중앙버스전용차로 보도블럭 정비요청 민원사항을 반영하여 작업물량 변경 실정보고임.

		관련근거

❍「2022년 도로옹벽 정밀점검용역」중간보고[도로보수과-23016호(2022.6.21.)]

		공사개요

❍ 공 사 명 : 2022년 도로 및 교통부속물 유지보수공사(연간단가)-북부

❍ 공사기간 : 2022. 4. 7. ~ 12. 31.

❍ 공사규모 : **************************

❍ 공 사 비 :**********************************

❍ 시 공 사 : ****************

		보고내용

❍ 2022년, 2021년 옹벽 점검 결과에 따른 옹벽 보수 물량 증가

▶ 옹벽부 열화로 인한 표면보수 물량 증가

▶ 철근노출 및 단면손상 부 물량 증가

❍ 중앙버스전용차로 보도블럭 물량 증가

▶ 보도블럭 침하 및 파손으로 인한 보수 및 교체 필요

▶ 점자보도블럭 등 유지보수 물량 증가(장애인 편익증진)

❍ 가드레일 설치 물량 증가

▶ 지속적으로 파손되는 교통안전시설물을 가드레일로 변경하여 설치 검토

		주요 변경내용

❍ 공사비 변경내역

(단위 : 원)

구 분	공 사 금 액			비고
	당 초	변 경	증·감
총공사비	***********	***********	************
도 급 비	***********	***********	************
이 전 비	*********	*********	-

❍ 주요공종 변경내역

공 종	규격	단위	수 량		증·감	비고
			당초	변경
********	주간	㎡	**	*****	*******
********	주간	㎡	**	****	*******
*******	주간	경간	*	**	*****

		조치계획

❍ ***************************************************************************************

붙임  1. 실정보고서(1회) 제출 1부.

2. 실정보고 내역서(제1회) 1부.  끝.