문서번호	도로보수과-22335
결재일자	2022. 6. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	성동도로사업소장
김영봉		엄기영	06/23
			이경우
협 조
	주무관			하승환
	주무관			최우람
	주무관			구준서
	주무관			이장환
	주무관			원동철
	공무직			정원근

『우기대비 도로파손(포트홀 등)』

전수조사 및 정비계획 보고

2022. 6.

성동도로사업소

(도로보수과)

『우기대비 도로파손(포트홀 등)』

전수조사 및 정비계획 보고

우기 대비 도로파손(포트홀 등) 발생 구간에 대하여 시민불편 및 안전사고 예방을 위해 전수조사 실시 및 정비계획을 보고 드림.

Ⅰ		추진배경

❍ 강우 시 도로파손(포트홀 등)으로 인한 시민 피해 발생

- 도로파손(포트홀 등)구간 차량(이륜차 포함) 주행시 안전사고 위험
- 우기시 수막현상, 동절기 빙판(블랙아이스) 등 차량 안전사고 위험
- 도로파손 구간 물고임으로 차량 주행시 보행자에게 물 튀김 피해

❍ 도로파손 구간에 대한 선제적 정비로 안전하고 쾌적한 도로환경 조성

- 우기대비 전수조사 및 정비(보수)를 통한 선제적 대응으로 시민불편 해소 및

정비(보수)효과 극대화

Ⅱ		전수조사 개요

❍ 조사기간: 2022. 6. 22. ~ 7.05.(10일간)

❍ 대상구간: 관내 시도(55개 노선, 연장 142.67km)중 도로파손 구간

❍ 조사방법: 담당노선(구청)별 전수조사 실시

- 담당노선(구청)별 순찰을 통해 차도 포장파손, 소성변형, 단차 등 구간 전수조사 후

붙임양식(1, 2) 보고(※ 출장 메모보고)

❍ 담당노선(구청)별 점검자(※관내시도 세부현황 별첨)

구 분	노선수	연장(km)	점검자	비 고
*	**	******
*******	**	*****	**************
*******	**	*****	**************
*******	**	*****	**************
*******	**	*****	**************

Ⅲ		전수조사 결과 정비계획

❍ 경미한사항 우기전 정비(보수) 완료

- 단순 포트홀 등 경미한사항에 대해서는 도로보수과 공무직(기동반) 활용 정비(보수) 완료

❍ 우선적 항구복구가 필요한 사항 (先)정비

- 소성변형 및 침하, 균열, 포트홀 등으로 절삭후 아스팔트포장이 필요한 구간중 시민불편 해소를 위해 우선적으로 정비가 필요한 구간에 대해서는『2022년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)』에 작업지시하여 정비(보수) 실시

❍ 예산 투입 항구복구가 필요한 사항은 예산확보 후 정비

- 중규모이상 절삭후 아스팔트포장이 필요한 구간은 예산확보 후 정비(보수)

Ⅳ		행정사항

❍ 2022. 6.22. ~ 8.12.: 경미한 사항 및 우선정비대상 정비완료(예정)

붙임  1. 도로파손 조사결과(양식) 1부.
2. 현황사진(양식) 1부.
3. 관내시도 세부현황 1부.  끝.