문서번호	총무과-28270
결재일자	2022. 6. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	총무과장
임광수	성호준	06/23
		이계열

「2022년 청사 전기설비 유지보수공사(연간단가)」 설계변경(1회) 검토보고

「2022년 청사 전기설비 유지보수공사(연간단가)」

설계변경(1회) 검토보고

2022.  6. 22. (수)

행 정 국

(총무과)

「2022년 청사 전기설비 유지보수공사(연간단가)」

설계변경(1회) 검토보고

「2022년 청사 전기설비 유지보수공사(연간단가)」관련 물량변경 및 신규공종 발생 등으로 설계변경을 실시하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 관련근거

ㅇ 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조

- 설계변경으로 인한 계약금액의 조정

ㅇ 지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준

- 제13장 공사계약 일반조건, 제6절 공사설계의 변경, 제7절 계약금액의 조정

□ 공사개요

*************************************

*************************************

******************************************

***************************

*************************

□ 설계변경 현황

ㅇ 변경사유

- 당초 공사량 추정 물량을 토대로 발주하였으나, 계약기간 중 물량 증‧감과 내역서에 없는 품목 추가 발생

- 기성대가 지급을 위해 물량 증‧감 및 신규 품목 반영한 설계변경 필요

ㅇ 주요 변경내역

******	**	****		****		*********
		**	** ****	**	** ****	**	** ****
************* ******	*	***	*****	*****	******	*****	******
*************		***	***	*****	******	*****	******
***********		***	***	*****	*****	*****	*****
************* ******		**	***	***	*****	***	*****

ㅇ 계약금액 변경

****	*******	*******	*********	**
***	***********	***********	*	*******

ㅇ 적용단가 협의

- 관련근거: 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 공사계약 일반조건 제7절(계약금액의 조정)

- 합의결과: 물량 증‧감은 계약단가 적용, 신규비목은 설계변경 당시를 기준으로 선정한 단가에 낙찰률 적용

□ 조치계획

ㅇ 설계변경에 따른 변경계약 의뢰

ㅇ 변경계약 완료 후 기성(1회) 준공

붙임  1. 설계변경내역서 1부.

2. 합의각서 2부.  끝.