투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	『신림선 도시철도 전면책임감리용역(4공구)』 변경계약 의뢰(총괄 13회, 6차 2회)

1. 도시철도사업부-23025호(2022. 6.15.) 관련입니다.

2. 『신림선 도시철도 민간투자사업 전면책임감리용역(4공구)』에 물가변동 조정금액을 반영하여 아래와 같이 계약 변경하고자 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

【  아    래  】

가. 용 역 명: 신림선 도시철도 민간투자사업 건설사업관리용역(4공구)

나. 계 약 자: (주)신성엔지니어링, (주)대한콘설탄트, (주)종합건축사사무소근정

다. 용역기간

구 분	용역기간	비 고
총괄 13회	'11.11. 1. ~ '22. 6.28.	계약기간 변경없음
6차 2회	'21. 5. 8. ~ '22. 6.28.

라. 용역금액 조정내역

(단위: 천원)

구 분	당 초	변 경	사 유
총괄 13회	3,551,340	3,595,800	- 계약기간 : 변경없음 - 계약금액 : 증)44,460 - 변경사유 : 물가변동 반영
6차 2회	632,100	676,560

마. 예산과목

- 도시철도건설사업비특별회계, 신교통수단도입, 경전철건설사업, 신림선 경전철 건설, 시설비및부대비, 감리비(401-02)

붙임  1. 계약금액 조정 검토보고서 1부.

2. 변경 내역서(총괄13회) 1부.

3. 변경 내역서(6차 2회) 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.

	도시철도사업부장
주무관	권용빈		신림선과장	김상용		도시철도사업부장	06/23
이철
협조자	주무관	조규영		재무과장	전성권
시행	도시철도사업부-23303	(	2022.06.23	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스빌딩 9층	/	www.seoul.go.kr
전화	02-772-7178	/전송	02-772-7305	/	dydqls1313@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)