문서번호	도로시설과-23363
결재일자	2022. 6. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설기획팀장	도로시설과장
정문수		이용구	전결 06/23
			임대운
협 조

「교량·터널 모니터링센터 운영 용역」

침수정보 연계를 위한 현안사항

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022.  6.

안전총괄실

(도로시설과)

「교량·터널 모니터링센터 운영 용역」

침수정보 연계를 위한 현안사항

도로시설과장 :임대운☎2133-1650 시설기획팀장 :이용구☎1652 담당 : 정문수☎1653

지하차도 등 도로시설물 침수예방을 위한 침수정보(펌프 가동 상태, 집수정 수위, 문자알림) 연계 및 기능 강화를 위한 현안사항 보고임.

□ 관련근거

ㅇ (주)유신 구조-22-3804('22. 6.16.)호와 관련임

□ 침수정보 연계 개요

ㅇ 규 모 : 연계 도로시설물 70개소(터널 1개, 지하차도 61개, 언더패스 8개)

- 침수정보(펌프 가동 상태, 집수정 수위, 문자알림) 연계

ㅇ 기 간 : ’22. 4. ~ ’22.12.(용역기간 : ’22. 4.27. ~ ’23. 4.26.)

ㅇ 예 산 : 161백만원('22 예산 500백만원) ※ 계약금액 : 489,500천원

□ 보고내용

ㅇ 지하차도 등 도로시설물 침수정보의 신속한 데이터 수집 및 정보 연계를 위하여 장비(게이트웨이, VPN) 추가 구매 및 통신(전기) 요금 반영이 필요함

- 추가 장비(4개) 구매**************

구 분		계	동부	서부	남부	성동	강서	시설공단
침수정보 연계 시설물(개소)		70	8	5	7	8	15	27
게이트웨이(개)	당초	0	0	0	0	0	0	0
	변경	2	0	0	0	0	1	1
VPN(개)	당초	6	1	1	1	1	1	1
	변경	8	3	1	1	1	1	1

- 정보 연계를 위한 통신요금*************

(단위 : 원)

**	*	**	**	**	**	**	**	****
*	*	*******	*******	*******	*******	*******	*******	*******
****	*******	******	******	******	*	******	******	******
**** ****	*********	*******	*******	*******	*******	*******	*******	*******
	*********	**********************************************

- 상도터널(CCTV 영상 연계) 전기요금**********

***********************************************

□ 조치의견

ㅇ 지하차도 등 도로시설물의 침수정보 연계 및 모바일웹 기능강화를 위한 추가 장비구매 통신(전기) 요금 납부에 대하여 계약업체에서 우선 시행하고 추후 설계변경 시 반영하고자 하며,

**************************************************************

**********************

****	**	**** ****	*******
****		******	******************
**********	**	******	*************************************
****	**	*****	*********************************** *************************************** *******************************************
****	**	**	**************************

붙임  실정보고 공문 1부.