국회의원 요구 자료 제출

시 행	도로계획과-23875
결재일자	2022.06.24
공개여부	부분공개(5)
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자 참조
수신자	기획담당관, 안전총괄과장

주무관		도로공간계획팀장	도로계획과장	안전총괄관	안전총괄실장	결재
정유빈		전기현	임창수	백일헌	06/24
					한제현
협 조
	방재시설과장				최진우
	주무관				김소연

제 목	국회의원 요구자료제출(요구번호 922번, 조수진 의원, 위원회 미정)

따로붙임 : 국회의원 요구자료 1부.  끝.

조수진 의원(위원회 미정, 국민의 힘)

요구번호 : 922

요구내용 : 국회대로 목동아파트 4~7단지 구간 평면화 복개 사업관련

- 사업 진행현황 및 향후계획

- 시공방법과 관련한 주민민원이 무엇인지? 이에 대한 서울시 입장은

□ 위원님께서 요구하신 국회대로 목동아파트 4~7단지 구간 평면화 관련 자료를
다음과 같이 제출합니다.

【 국회대로 지하차도 및 상부공원화 】

1. 사업개요

○ 위   치 : 양천구 신월IC ~ 영등포구 국회의사당 교차로

○ 규   모 : 연장 7.6km, 폭 40~55m (친환경공간 약 11만㎡)

· 지하차도 및 중앙공원화 구간 : 신월IC ~ 목동운동장, 연장 4.1km
※ (덮개구간 평면화) 홍익병원교차로 ~ 서울청소년수련관, 연장 0.95km

· 도로다이어트 구간 : 목동운동장 ~ 국회의사당, 연장 3.5km

○ 사업기간 : 2013 ~ 2025. 12.

○ 총사업비 : 4,015억원

2. 추진현황

○ '16.~'20.	: 지하차도 기본 및 실시설계 시행

○ '18.08.	: 1단계(신월IC~화곡고가사거리) 공사 착수

○ '21.01.	: 2단계(화곡고가사거리~목동운동장, 선유고가차도) 공사 착수

○ '21.09.	: 사업계획변경(덮개구간 평면화) 심의 (결과 : 적정)

○ '21.12.	: 덮개구간 평면화 변경설계 착수 (도기본 방재시설부)

○ '22.06.현재 : 공사 및 설계 진행 중 (공정률 14.7%)

· (공사) 지하차도 구간 하수도이설, 가시설 및 선유고가 철거 중

· (설계) 덮개구간 평면화 설계, 상부공원화 기본 및 실시설계(~22.12.)

3. 공법 관련 주민 민원사항

○ 민원내용

*********************************************************************

○ 우리시 추진계획

*****************************************************************************************************************

4. 향후 계획

○ '22.12.	: 덮개구간 평면화 변경설계 및 상부공원화 설계 완료

○ '24.12.	: 지하차도 공사 완료

○ '25.12.	: 상부공원 조성 완료

5. 위 치 도

선유고가

******

**********

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (도로계획과) (방재시설과)	담당사무관	전 기 현 최 진 우
	☎ 2133-8087 3708-8762	주무관	정 유 빈 김 소 연
	작 성 일 : 2022. 06.