문서번호	토목부-25591
결재일자	2022. 6. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
노승환		김동현	06/24
			하현석
협조
	주무관		박희정

설계변경(전체6회, 2차1회) 검토보고

(세종대로 도로공간 재편사업외 2개소 통합 감독권한대행 등 건설사업관리용역)

2022. 06.

도시기반시설본부

토 목 부

설계변경(전체6회, 2차1회)검토 보고

(세종대로 도로공간 재편사업외 2개소 통합 감독권한대행 등 건설사업관리용역)

청계천~정릉천 자전거도로 연결공사와 관련 수방대책기간 공사중지 및 사업계획변경 등 현장여건을 반영하여 건설사업관리용역 계약기간 변경 보고임.

Ⅰ		관 련 근 거

○ "사업계획 변경 검토보고" (토목부-25250, 2022.06.17.)

Ⅱ		용 역 개 요

○ 용 역 명 : 세종대로도로공간 재편사업 외 2개소 통합감독권한대행 등 건설사업관리용역

○ 용역규모 : 상주감리원 109.22 인·월, 기술지원감리원 15.50 인·월

○ 용 역 비 : 1,927,525천원 (2차: 310,000천원)

○ 용역기간 : '20.06.22. ∼ '22.07.12. (2차 : '22.01.01. ∼ '22.07.12.)

○ 용 역 사 : 수성엔지니어링㈜ 외 1개사

Ⅲ		설계변경 및 주요내용

○ 용역기간 검토

구 분		당 초	변 경	증 감	비 고
세종대로 도로공간 재편사업 (청계천~정릉천 자전거도로 연결공사)	전체 (6회)	'20.06.22. ~ '22.07.12. (751일)	'20.06.22. ~ '22.12.31. (923일)	증) 172일	수방대책기간 공사중지
	2차 1회 (금차)	'22.01.01. ~ '22.07.12 (193일)	'22.01.01. ~ '22.12.31. (365일)	증) 172일	수방대책기간 공사중지
청계천로 자전거 전용도로 설치공사	전체분	'20.09.01.~ '21.07.20.	'20.09.01.~ '21.07.20.	변경없음	용역완료
	1차	'20.09.01.~ '21.07.20.	'20.09.01.~ '21.07.20.	변경없음	용역완료

○ 용역비 검토                                           (단위: 천원)

구 분	전체분(6회)			금차분 (2차1회)			비고
	당 초	변 경	증 감	당 초	변 경	증 감
세종대로 도로공간 재편사업 (청계천~정릉천 자전거도로 연결공사)	1,427,645	1,427,645	-	310,000	310,000	-	수방기간 공사중지에 따른 건설기술인 철수 및 추후 재배치
청계천로 자전거 전용도로 설치공사 (용역완료)	499,880	499,880	-	-	-	-
계	1,927,525	1,927,525	-	310,000	310,000	-

Ⅴ		조 치 계 획

○ "청계천~정릉천 자전거도로 연결공사"에 대하여 수방기간 하천내 공사중지에 따른 건설기술인의 철수·투입 계획을 조정하여 용역비 증감없이 용역 계약기간을 변경하여 설계변경 시행코자 함.

붙임 1. 책임기술인 설계변경 합의각서 1부.

2. 전체(6차) 설계내역서.

3. 금차(2차1회) 설계내역서.  끝.