설계변경 심의 의견서

(2021년 천호1동 외 7개동 상수도공사-2차 변경 최종)

1. 공사명: 2021년 천호1동 외 7개동 상수도공사(장기계속)

신청 부서명	강동수도사업소 시설관리과
업무 담당	지방시설서기 김성준
제출 년월일	2022. 6. 24.

2.  심의 위원회 의견

- 심의일시: 2022. 6. 24. (금) 17:00

- 심의의견: 설계변경에 따른 심의 결과에 대하여 다음과    같이 의견을 제시함.

위   원

직  위

성  명

서  명

의  견

위 원 장

시설관리과장

이규희

06/27

타당함

이규희

위    원

급수운영팀장

임인택

임인택

타당함

위    원

급수관리팀장

양재덕

양재덕

타당함

위    원

시설운영팀장

송종학

송종학

타당함

위    원

시설관리팀장

김주경

김주경

타당함

위    원

주무관

강희창

강희창

타당함

담    당

주무관

김성준

김성준

-

설계변경 사유서(2차 변경 최종)

□ 공사개요

○ 공 사 명: 2021년 천호1동 외 7개동 상수도공사(장기계속단가계약)

○ 공사규모

- 당초: D=15~300mm, L=1,673m

- 변경: D=15~300mm, L=1,265m

○ 공사기간: 2021. 6. 21. ~ 2022. 6. 30.

○ 도 급 비: ***************

***************

○ 도 급 자: ****************

□ 설계변경 세부내용 및 사유

○ 계약물량 변경: 물량 증·감에 따른 변경 및 계약금액 변경

- *********************************

- *********************************

○ 신규공종 발생

- *******************************

- **************************

□ 설계변경(2차) 및 차수별 금액 내역                                                                                  (단위 : 원)

구 분	당초 금액	변경 금액	비 고
총계약금액	658,884,320	658,833,000	감 51,320
1차수 금액	443,000,000	298,724,000	-
2차수 금액	215,884,320	360,109,000	감 51,320

○ 설계 변경 의견

- 신규공종 및 실제 계약물량 증․감 사항 및 계약종료에 따른 차수별 부기금액

설계변경 시행이 타당함.

붙임  1. 설계변경 내역서(2차, 최종) 1부.

2. 차수별 내역서(1,2차) 1부.