문서번호	민방위경보통제소-21163
결재일자	2022. 6. 27.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

				시 민
주무관	경보운영팀장	민방위경보통제소장		서울종합방재센터소장
조경진	김성민	이권석		06/27
				代이원석
협 조
	경보상황팀장		임종학

민방위경보일제지령시스템 교체사업 완료 보고

2022. 6.

서울종합방재센터

(민방위경보통제소)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료, 빅데이터 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

민방위경보 일제지령시스템 교체사업 완료 보고

민방위경보 상황실에 설치되어 운영 중인 민방위경보 일제지령시스템이 내용연수 경과로 노후 되고 운영체제 기술지원이 종료되어 실시한 일제지령시스템 교체사업에 대한 완료 보고임

Ⅰ		관련근거

○ 민방위경보통제소-468(2022.2.14.)호 ‘노후 민방위경보 일제지령시스템 교체계획’

○ 서울시 재무과-25579(2022.4.20.)호 ‘계약체결 통보(일제지령시스템 노후 교체 및 보강)’

○ 자원관리과-24148(2022.6.21.)호‘노후 민방위경보 일제지령시스템 노후 교체 및 보강사업 검사검수 확인요청’

Ⅱ		사업개요

○ 사 업 명 : 민방위경보 일제지령시스템 노후교체 및 보강

○ 계 약 자 : **********

○ 계약금액 : ************

○ 사업기간 : 2022. 4. 20. ~ 6. 23.

○ 사업내용 : 민방위경보 일제지령시스템 1식, 데이터전송장치(DSU) 1식, 기타 부대장치 등 노후시설 교체 설치

※ 민방위경보 시스템 구성도

☞ 일제지령시스템 : 경보상황실에서 일시에 민방위경보단말 *****에 사이렌 스피커를 동시 작동시켜 음성으로 민방위경보를 발령하는 장비

Ⅲ		추진경과

○ 계약 및 사업자 선정                         : ‘22.4.20.

○ 주요 물품 납품 전 품질관리 테스트            : ‘22.5.2. ~ 5.12.

○ 작업자 안전 및 보안교육                     : ‘22.5.13.

○ 중앙민방위통제센터 교체 관련 협조 요청       : ‘22.5.31.

○ 일제지령시스템 교체작업 실시                 : ‘22.6.8. ~ 6.10.

○ 데이터전송장치 교체작업 실시                 : ‘22.6.13. ~ 6.17.

○ 준공검사                                    : ‘22.6.23.

Ⅳ		준공검사 결과

○ 검사일자 : 2022. 6. 23.

○ 설치장소 : 서울종합방재센터 민방위경보상황실

○ 검 사 자 : 운영팀장 김성민, 상황팀장 임종학

○ 입 회 자 : 방송통신7급 전태진, 방송통신7급 조경진

○ 검사내용

*************************

***************************************

**********************************

○ 검사결과

- 물품 수량 및 규격 : 설치설명서(시방서) 규격과 동급으로 이상없음

- 시스템 성능 : 설치설명서(시방서) 규격에 적합

Ⅴ		행정사항

○ 신규 일제지령시스템 구축에 따른 운영자 교육 실시('22.7월 중)

- 민방위경보전파 대상 건축물 경보통제시스템 운영자교육과 병행실시.  끝.