“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강동수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(2차,최종) 시행(2021년 천호1동 외 7개동 상수도공사)

우리사업소에서 시행하고 있는 『2021년 천호1동외 7개동 상수도공사(장기계속단가계약)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(2차, 최종)을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2021년 천호1동 외 7개동 상수도공사(장기계속단가계약)

나. 도 급 자 : 서원진흥건설(주)  대표 이정길

다. 계약기간 : 2021.6.1. ~ 2022.6.30.(총 공사부기기간 : 2021.6.1.~ 2022.6.30.)

라. 설계변경 내용 : 신공종 발생 및 계약물량 증․감

마. 설계변경 내역                                                     (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	비 고
총 부기금액	658,884,320	658,833,000	감 51,320
1차 부기금액	443,000,000	298,724,000	-
2차 부기금액	215,884,320	360,109,000	감 51,320

바. 설계변경 사유 : 시공물량 증,감 및 신공종 발생 등으로 계약금액 변동

사. 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,급.배수공사비,신설공사비

상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비(교체장애수전,불용관)

상수도사업비용,영업비용,배급수비,지원사업성시설비(수도계량기보온재)

자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비및부대비, 시설비

붙임  1. 설계변경 심의 의견서 1부.

2. 설계변경 내역서(2차 최종) 1부.

3. 합의서 1부.  끝.

주무관	김성준		시설운영팀장	송종학		시설관리과장	이규희		강동수도사업소장	06/27
김명용
협조자	주무관	권란연
시행	시설관리과-25648	(	2022.06.27	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51, 강동수도사업소	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5207	/전송	02-3146-5239	/	sungjunk98@seoul.go.kr	/	부분공개(5)