문서번호	기전과-22417
결재일자	2022. 6. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
박건우		문동하	06/27
			이경우
협조

『옥수고가차도 외 2개소 노후 조명시설 개선공사』

설계변경(정산) 검토 보고

2022. 6.

성동도로사업소

(기전과)

『옥수고가차도 외 2개소 노후 조명시설 개선공사』

설계변경(정산) 검토 보고

『옥수고가차도 외 2개소 노후 조명시설 개선공사』 시행 중 물량변동이 있어 아래와 같이 설계변경을 실시하고 준공 처리하고자 함.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 옥수고가차도 외 2개소 노후 조명시설 개선공사

○ 계약금액 : ************

○ 계 약 일 : 2022. 4. 6.

○ 착 공 일 : 2022. 4. 11.

○ 준공기한 : 2022. 6. 29.

○ 공사내용 : LED등기구 98등 설치, 가로등주 10본 및 선로교체

○ 계약업체 : ********************

□ 설계변경 개요

○ 설계변경 사유

- 공사 추진과정 중 설치위치 변동에 따른 물량 변경 적용

- 공사원가계산서상의 각종 보험료 감액 정산

○ 설계변경 금액

(단위 : 원)

구분		변경전	변경후	증, 감	비고
도급비	공급가액	78,753,964	78,487,273	-266,691
	부가가치세	7,875,396	7,848,727	-26,669
	합계	86,629,360	86,336,000	-293,360

○ 주요 변경 내역

연번	내용	규격	변경전	변경후	비고
1	전선관 배관	STEEL 28C	0	79.5m	압구정고가
2	전선관 배관	flexible 22C	0	91.9m	압구정고가
3	전력케이블 신설	CV 6㎟×3C	0	84.5m	압구정고가
4	풀박스 설치	100*100*100	0	5	압구정고가
5	전선관 지중배관	파상형 PE 50C	18.7m	0	제2마장교
6	터파기		6.1149㎥	0	제2마장교
7	되메우기		6.1149㎥	0	제2마장교
8	ASP 절단		52m	0	제2마장교
9	ASP 파쇄		1.04㎥	0	제2마장교
10	ASP 복구		1.04㎥	0	제2마장교

□ 보고자 의견

○ 변동내역에 의거 설계변경(정산)을 시행하여 준공 처리하고자 함.

붙임  1. 설계변경 내역서 1부.

2. 제비율검증 확인서 1부.

3. 산업안전보건관리비 검토결과서 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.