투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	서울도시철도 9호선 4단계 연장사업 건설공사 철도교통안전진단용역 준공기한 연기 요청

1. 도시철도계획부-22849(2022. 6. 24.)호와 관련입니다.

2. 우리부에서 시행 중인 「서울도시철도 9호선 4단계 연장사업 건설공사 철도교통안전진단용역」에 대해 다음과 같이 준공기한 연기를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역명 : 서울도시철도 9호선 4단계 연장사업 건설공사 철도교통안전진단용역

나. 계약업체 : 한국교통안전공단

다. 계약금액 : 금170,073,000원

라. 용역기간 ┎ 당초 : 2021. 12. 3. ~ 2022. 7. 2.

┖ 변경 : 2021. 12. 3. ~ 2022. 9. 2.(증 2개월)

마. 연기사유: 신호분야 기본설계용역 계약 유찰(2회)로 인한 기본설계도서 제출이 지연됨에 따라 후속 용역인 철도교통안전진단이 늦어졌으며, 향후 진행될 국토교통부(철도국) 협의, 통합 회의 등 일정에 있어 용역기간이 절대적으로 부족한바, 원활한 용역 수행을 위해 준공기한 연장

바. 귀책소재 : 계약자 귀책사유 없음(지체상금 미부과)

붙임  1. 준공기한 연기 보고 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 준공기한 연기 합의서 1부.  끝.

	도시철도계획부장
주무관	조종석		도시철도설계과장	강명석		도시철도계획부장	06/27
정대현
협조자
시행	도시철도계획부-22914	(	2022.06.27	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 10층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-772-7146	/전송	02-772-7304	/	jjs7001@seoul.go.kr	/	부분공개(6)